문서번호	기반시설과-1651
결재일자	2020.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		라철흠	05/15 전영주
협 조

『성수대교북단외2개소승강기설치공사』

건설폐기물 처리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

『성수대교북단외2개소 승강기 설치공사』

건설폐기물 처리계획 보고

「성수대교북단외2개소 승강기 설치공사」에서 발생되는 건설폐기물(폐콘크리트 및 폐아스콘)처리계획에 대한 보고임.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 성수대교북단외2개소승강기설치공사

○ 공사기간 : 2019. 11. 04. ~ 2020.12.20

○ 도 급 비  : 3,224백만원

○ 계약상대자

- 주계약자 : ㈜명남종합건설 대표 박남재

- 부계약자 : ㈜금성이에스   대표 이정만

○ 공사규모

- 승강기 및 비상계단 신설 : 성수대교 북단, 동작대교 북단

- 비상계단 신설 : 성수대교 남단

2		보고내용

○ 현  황

- 당초 설계시 건설폐기물 처리수량이 46톤(폐콘 45톤, 폐아스콘2톤)으로 도급비에 포함 처리하는 것으로 설계됨

○ 문제점

- 동작대교북단 경사로 개선(실정보고 명남 2020-18(20.4.27)으로 인한  폐콘크리트 물량(76톤) 및 성수대교북단 자전거도로 우회공사로 발생한 폐아스콘(71톤) 추가됨에 따라 총수량이 194톤으로 공사에  포함하여 처리 불가함(건설폐기물촉진에관한법률 제15조 및 시행령 11조-건설폐기물처리용역의 발주)

○ 조치방안

- 발생된 폐기물에 대하여 현장적치후 관련 법령에 따라 건설폐기물 처리 용역으로 별도 발주하여 적법하게 위탁처리

○ 폐기물수량 증․감 현황

구 분	단위	당초	변경	증,감		비 고
1. 성수대교북단	톤	1.00	71.00		70.0
2. 동작대교북단	톤	2.00	78.0	증)	76.0
3. 성수대교남단	톤	44.00	44.00	증)	0
합 계		47.00	193.00		146.00

○ 공사비 현황

- 건설폐기물 처리용역                                        (단위:원)

공 종		규 격	수 량		금 액		비 고
			당초	변경	당초	변경
운반비	폐콘크리트	톤	47	123	454,322	811,800	증)	357,478
	폐아스콘	톤	-	70	-	462,000	증)	462,000
	혼합폐기물	톤	-	1	-	6,600	증)	6,600
처리비	폐콘크리트	톤	47	123	825,216	2,232,600	증)	1,407,384
	폐아스콘	톤	-	70	-	1,344,000	증)	1,324,800
	혼합폐기물	톤	-	1	-	46,400	증)	46,400
소 계			-		1,279,538	4,903,400	증)	3,623,862
부가가치세			-		127,953	490,340	증)	362,387
도 급 비			47	194	1,407,491	5,393,740	증)	3,986,249

※ 산출근거 : 산출기초조사서 및 견적서 참조

3		조치계획

○ 폐기물처리 : 수량증가에 따라 공사에 포함 처리하는 것은 관련 법령에 저촉되므로 관련 법령에 따라 용역 발주

○ 계약방법 : 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제25조(추정가격이 20백만원 이하의 용역)

- 계약업체 : 폐기물 처리업체 비교 견적결과 최저가 업체인 주식회사  동보이엔씨와 수의계약 체결시행

○ 현장에서 발생된 건설폐기물에 대하여 계약업체가 운반및처리토록하고 추후 설계변경시 정산처리 하고자 함

붙 임 : 1. 설계내역서 및  견적서 1부.

2. 산출기초조사서 및 수량산출서 각 1부.

3. 청렴계약이행서약서 및 수의계약 사유서 각1부 끝.