“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	변경 계약 의뢰(낙산배수지 건설공사 전기공사)

1. 기전설비과-4738호(’20.5.14.)와 관련입니다.

2.『낙산배수지 건설공사 전기공사(2차분)』의 준공기한 연기를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사 전기공사

나. 공사개요 : 배수지 증설공사(증2,300㎥)에 따른 부대 전기설비 공사

다. 계 약 자 : 주식회사 우주전력(대표 정윤주)

라. 예산과목 : 관)자본적지출, 항)비가동설비자산취득, 세항)건설중인자산,

사업)낙산배수지 건설공사, 목)시설비및부대비, 세목)시설비(사고이월)

마. 준공기한 연기

구 분		계약금액(원)	당 초	변 경	비 고 (계약번호)
전기 공사	총차분	149,000,000	‘18.6.4.∼’20.5.30.	‘18.6.4.∼’20.6.29.	20181215EA-01
	2차분 (사고이월)	114,840,000	‘19.1.1.∼’20.5.15.	‘19.1.1.∼’20.6.23.
	3차분 (장래분)	6,840,000	‘20.5.16.∼’20.5.30.	‘20.6.24.∼’20.6.29.	계약전

- 사  유 :  유지관리부서 요청사항 반영으로 낙산배수지 건설공사(토목공사)의 사업기간이 연장됨에 따라, 연계된 낙산배수지 건설공사(전기분야)의 준공기한을 연기함.

붙임  1. 방침서(준공기한 연기) 1부.

2. 합의서(준공기한 연기) 1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	임은비		기전설비과장	05/15 조성태
협조자
시행	기전설비과-4746	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 서울시 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1337	/전송	02)3146-1319	/		/	부분공개(5)