코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(한양도성 유적전시관 전시설계 및 제작·설치)

1. 관련근거 : 한양도성도감-5272(’20.5.18.)

2. 우리 부서에서 시행 중인 ‘한양도성 현장유적박물관 전시설계 및 제작‧설치 용역’의       준공기한을 아래와 같이 연장하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 계약건명 : 한양도성 현장유적박물관 전시설계 및 제작‧설치 용역

- 계약업체 : ㈜플러스페이스********

- 계약금액 : **************************

나. 변경내용 : 계약기간 연장 (금액변동없음)

- 당 초 :  2019. 5. 29 ~ 2020. 5. 29

**********************************************

※ 연장사유 : 한양도성 현장유적전시관(가칭) 건축 공기 연장(한양도성-4400,’20.4.17.)에 따라 계약기간 내 실내전시 및 야외유적 컨텐츠 제작 및 설치가 불가하여 계약 연장 필요

붙임  1. 준공기한 연기 검토 방침서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 계약기간 연장계 1부

4. 합의각서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
주무관	이미애		세계유산연구팀장	강성희		한양도성도감과장	05/18 안중호
협조자
시행	한양도성도감-5283	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2667	/전송		/	promenade@seoul.go.kr	/	부분공개(5)