코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰

1. 공공개발기획단-5292호(2020. 5. 15.)와 관련입니다.

2. 우리 단에서 추진중인 인재개발원일대 구조안전진단 용역에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 인재개발원일대 구조안전진단 용역

나. 계 약 자 : **************

다. 용역기간

- 기존 : 2020. 3. 25. ~ 5. 25. (2개월)

- 변경 : 2020. 3. 25. ~ 7. 26. (4개월)

라. 계약금액

- 기존 : 금53,904,000원

- 변경 : 금51,847,400원(감2,056,600원)

마. 변경사유 : 코로나 대응 및 과업내용 변경에 따라 기간 및 금액 변경

바. 예산과목 : 도시개발의 공공성 강화, 도시발전 및 공공개발, 토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영, 시설비

첨부   1. 용역 설계변경 방침 1부.

2. 용역사 계약변경 요청 공문 1부.

3. 변경설계내역서 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 과업내용서(변경) 1부.

6. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	공공개발기획단장
주무관	최희영		공공토지팀장	염규엽		공공개발추진반장	05/18 이상면
협조자	계약1팀장	조현
시행	공공개발기획단-5315	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)