문서번호	설비부-7162
결재일자	2020.5.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	05/19 代여인웅
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

물가변동(제3회)으로 인한 계약금액 조정 검토보고

2020. 05.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

물가변동(제3회)으로 인한 계약금액 조정 검토보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』계약상대자로부터 물가변동(ESC 3회)에 의한 계약금액 조정 요청이 있기에 물가변동 금액 적정 여부를 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 소형2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공 사 비 : *************************************

□  시 공 사 : **************************

□  감 리 사 : ㈜동성엔지니어링

□  공 정 률 : 46%(골조공사 매입배관 진행)

2		관련근거

□ 지방계약법 시행령 제73조(물가변동으로 인한 계약금액 조정)

□ 남산예장 제2019-565호 : 건설사업관리단 물가변동 검토보고

3		계약금액 조정(ESC) 검토내용

□  물가변동으로 인한 계약금액 조정 충족 요건(아래 ①, ② 동시 충족)

① 직전 물가변동 조정일 후 90일 이상 경과

② 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

□  계약금액 조정 검토 내용

○ 물가변동 충족조건 검토

기준시점 (직전 조정일)	비교시점 (조정 기준일)	경과일수	지수 조정률	검토결과
*********	*********	****	*****	**

○ 계약금액 조정 세부검토 내용

구 분		검토내용	비 고
계약금액(A)		**************
물가변동 제외금액(B)		************
물가변동 조정기준일 공정률	예정공정률	******
	실행공정률	******
	제외공정률	******	예정,실행 비교하여 최대 공정률 제외
물가변동 적용대가(C)		**************	C=A-B
물가변동 조정률(D)		*****	지수조정률 산출표 참조
물가변동 등락대상 조정금액(E)		***********	E=C*D
선급금 공제금액(F)		**	선금지급 없음
물가변동 적용금액		***********	천단위 절사

□  물가변동으로 인한 계약금액 조정내용

구분	당초	변경후	증감액
총차	**************	**************	*************
3차	**************	**************	*************

4		보고자 의견

□ 계약상대자가 신청한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청내용에         대한 책임 건설사업관리자의 검토 보고가 적합하다고 판단되므로, 계약        부서에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부. 끝.