투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	여의도공원관리사무소장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(선유교 입구 장애인 램프 재정비 공사)

1. 여의도공원관리사무소-1245(2020. 5. 18.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 알려 드리니, 계약기간 내     공사가 무위 준공될 수 있도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 건명: 선유교 입구 장애인 램프 재정비 공사

나. 계약자: 우나조경건설 주식회사 대표 이현정

다. 계약금액: 금49,360,000원(금사천구백삼십육만원)

※ 원인행위No: 491

라. 계약기간: 2020. 4. 14.~ 2019. 5. 19.

마. 변경내용: 계약금액, 준공기한 변경

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도 급 액	공급가액	44,872,728	49,858,755	4,986,027
	부가세	4,487,272	4,985,875	498,603
	도급공사비	49,360,000	54,844,630	5,484,630

- 준공기한: 2020. 5. 19. ⟶ 2020. 5. 29.

붙임  공사변경계약서 1부.  끝.

	공원운영과장
★주무관	김호영		재무팀장	김극남		공원운영과장	05/19 최석환
협조자
시행	공원운영과-6613	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)