문서번호	물재생계획과-7252
결재일자	2020.5.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		하수정비팀장		물재생계획과장
이승주		이두환		05/20 이임섭
협 조

국고보조금 교부 지연에 따른

‘20년 도로함몰 정비사업 예산 재배정 변경 계획

2020. 05.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

‘20년 국고보조금 교부 지연에 따른

도로함몰 예방 노후 하수관로 정비예산 재배정 변경 계획

2020년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비사업과 관련하여 국고보조금(7,772백만원) 교부 지연에 따른 예산재배정 변경 계획을 보고 드림

1		사업개요

□ 사 업 명 : ’20년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비사업

□ 규    모 : 하수관로 정비 L=70㎞

□ 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 12.

□ 사 업 비 : 1,502억원(시비 1,424, 국비 78)

구 분	합 계	장기계속 1차	장기계속 2차
		‘19년 사고이월	계	‘19년 건설개량이월	‘20년 예산
사 업 비	1,502억원 (시비 1,424, 국비 78)	511억원 (시비)	991억원 (시비 913, 국비 78)	313억원 (시비)	678억원 (시비600, 국비 78)
규모(계획)	70㎞	16㎞	54㎞	17㎞	37㎞

※ ‘20.4.30.기준 36㎞ 정비완료(52%)

2		현황 및 문제점

□ ‘20년 예산 재배정 현황                                 (단위:백만원)

예산현액			재배정액			재배정 잔액
계	시비	국비	계	시비	국비	계	시비	국비
******	******	*****	******	******	*	*****	*****	*

○ ‘20년 예산으로 사업 추진 예정인 10개 자치구 중 8개구 예산 재배정 완료

○ 미 재배정액 : ********

**********************************

**********************************

□ 문제점

○ 당초 ’20.4월경 한강유역환경청으로부터 교부 예정이었던 ’20년 국고보조금(7,772백만원) 배정이 지연됨에 따라 그간 시비(본예산)+국비로 사업추진 예정인 자치구는 우선 시비로 예산 재배정하였으나,

※ 한강유역환경청 유선 협의(4.21./ 5.12.) 결과 기획재정부(환경부)로부터 하수관로 사업 예산 배정이 늦어짐에 따라 서울시 예산 교부 시기가 불확실하다는 입장임

○ ’20.5월 현재 2개 자치구(종로구, 은평구)는 장기계속2차 사업시행을 위한 재배정 예산**********이 부족한 실정임

3		조치계획

□ 시비로 기 재배정된 자치구 중 총사업비(2차분) 및 미 원인행위된 낙찰차액 등을 감안하여 예산 부족분만큼 시비 감배정하고 추후 국고보조금 교부시(6월 이후) 재배정 및 예산 변경 조치               (단위:천원)

자치구	당 초	변 경	증감액	비고
****	**********	**********	***********
***	*********	*********	************
***	*********	*********	************
***	**********	*********	************
***	**********	**********	************
***	*********	*********	************

4		행정사항

□ 예산재배정 변경(안)에 따라 감배정 및 재배정 조치

□ 국고보조금 교부 지속 요청(→한강유역환경청)

붙임  ’20년 도로함몰(장기계속2차) 예산재배정 변경(안) 1부.  끝.

붙임		‘20년 도로함몰(장기계속2차) 예산재배정 변경(안)

자치구	당초				변경				비고
	계	시비	국비	건설개량이월	계	본예산	국비	건설개량이월
합 계	**********	**********	**********	**********	**********	**********	*	**********	***********
종로구	***********	***********	*********	***	***********	**********	***	***	*****
용산구	***********	***********	*********	***	*********	*********	***	***	**********
광진구	***********	***	***	***********	***********	***	***	**********
동대문구	***********	***	***	***********	***********	***	***	**********
중랑구	***********	***	***	***********	***********	***	***	**********
성북구	***********	***********	*********	***	***********	**********	***	***
강북구	***********	***	***	***********	***********	***	***	**********
도봉구	***********	***********	*********	***	***********	**********	***	***
노원구	***********	***	***	***********	***********	***	***	**********
은평구	***********	***********	*********	***	***********	**********	***	***	*****
서대문구	***********	***	***	***********	***********	***	***	**********	*****
양천구	***********	***********	***********	***	**********	*********	***	***	*********
구로구	***********	***	***	***********	***********	***	***	**********
금천구	***********	***	***	***********	***********	***	***	**********
영등포구	***********	***********	***	***********	***********	**********	***	**********
관악구	***********	***********	***********	***	*********	*********	***	***	***********
서초구	***********	***	***	***********	***********	***	***	**********
강남구	***********	***	***	***********	***********	***	***	**********
송파구	***********	***********	***********	***	***********	***********	***	***	***********
강동구	***********	***********	***********	***	***********	**********	***	***	***********

‣ 예산재배정 잔액 : 2,669,674천원(계약심사절감액 등)

‣ ‘19년 사고이월 예산재배정 : 22개 자치구 51,127,717천원

‣ ’20년 국고보조금(7,772백만원) 교부시 재배정 및 재원변경 조치