문서번호	지역돌봄복지과-10325
결재일자	2020.5.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설팀장	지역돌봄복지과장
박슬기	서해경	05/20 하영태

2020년 확정기능보강사업 변경 계획(안) [서대문]

2020. 5

복 지 정 책 실

(지역돌봄복지과)

2020년 확정기능보강사업 변경 계획(안) [서대문]

2020년 확정기능보강사업 중 서대문종합사회복지관(서대문구)의 사업 계획 변경 요청에 따라 검토 하여 승인하고자 함

□ 요청사항

◯ 2020년 종합사회복지관 기능보강사업 계획 변경 신청

(서대문구 복지정책과-8559, 2020.4.29.)

◯ 시 설 명 : 서대문종합사회복지관

◯ 사 업 명 : 승강기 안전장치 설치

◯ 요청내용 : 승강기 안전장치 설치비용 증액

□ 사업변경 신청사항

◯ 승강기 안전장치(4개)설치 시 2021년 기능보강사업으로 신청한 승강기 안전장치(3개)를 추가하여 일괄 설치하고자 함

- 2020년 기능보강사업 신청 당시 개발되지 않았던 일부 안전장치 3개(승강장문 어린이 손끼임 방지수단, 카문 어린이 손끼임 방지수단, 승강장문 조립체 이탈방지)가 개발되어 2021년 기능보강사업으로 신청하였으나

- 당해 확정된 승강기 안전장치(4개) 설치 시 2021년 신청부분까지 일괄 공사를 진행하고자 추가된 3개의 안전장치 설치비용 2,420천원 증액 요청

➤ 전기식 엘리베이터 정밀안전검사 기준

① 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단 ② 카문 어린이 손 끼임 방지수단

③ 승강장문 조립체 이탈방지장치 ④ 승강장문 비상가이드 ⑤ 카의 상승과속 방지수단

⑥ 카의 개문출발 방지수단 ⑦ 브레이크 시스템 ⑧ 자동구출 운전수단

□ 검토결과 - 승강기 안전장치 설치비용 증액 ‘승인’

◯ 검토의견 (서울시 복지재단 타당성 검토 반영)

- 2020년 사업신청 당시에는 개발되지 않았던 3가지 안전장치에 대하여 2021년 기능보강 사업으로 신청하였으나,

- 금년에 일괄 진행하는 것이 분리발주 방지(동종공사) 및 예산 절감 효과와 시설물 관리 용이성 확보 등 법정 기준에 맞는 승강기 안전장치 설치를 당해에 미리 설치함으로서 이용자들의 안전성 확보에 유리함

※ 2021년 사업신청비 3,900천원으로, 금년에 일괄추진 시 약 1,500천원 예산절감

- 종합적으로 검토한 결과 사업계획 변경이 당초 사업목적인 승강기 안전장치 설치와 부합하므로 사업집행의 효율성과 예산절감 효과 등을 감안하여 이용자들의 안전을 위해 사업계획 변경 및 사업비 2,420천원 증액 승인

◯ 총 사업비 : 12,100천원 → 14,520천원(시비 1,452천원 증액)

※ 시‧자치구비 분담률 6:4

□ 기능보강사업 변경 대비표

◯ 변경 대비표

(단위 : 천원)

사업명	기 존			변 경			증 감
	예 산		내 용	예 산		내 용
승강기 안전장치 설치	시비	7,260	<안전장치 3개 설치> - 카의 상승과속 방지수단 - 카의 개문출발 방지수단 - 브레이크 시스템 - 자동구출 운전수단	시비	8,712	<안전장치 7개 설치> - 카의 상승과속 방지수단 - 카의 개문출발 방지수단 - 브레이크 시스템 - 자동구출 운전수단 - 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단 - 카문 어린이 손 끼임 방지수단 - 승강장문 조립체 이탈방지장치	2,420
	구비	4,840		구비	5,808
	자부담	-		자부담	-
	총액	12,100		총액	14,520

□ 향후계획

◯ 추가 사업비 교부(시비 1,452천원)	: 2020. 5월

붙임 : 1. 사업변경 승인요청 공문 1부.

2. 기능보강 사업변경을 위한 서류 일체 각 1부.

3. 서울시 복지재단 타당성 검토 1부.