문서번호	누수방지과-1697
결재일자	2020.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설관리부장
김영일		代성기옥		05/21 신용철
협 조
	주무관				한현숙
	주무관				차경호
	주무관				김일구
	주무관				노경철
	주무관				김주연

2019년 하반기 유수율 향상 추진사업 점검결과 보고

2020. 5.

시설관리부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 하반기 유수율 향상 추진실적 점검 결과보고

“2019년 하반기 수도사업소에서 추진한 유수율 향상 추진사업

실적에 대한 점검결과를 보고함

Ⅰ		점검 개요

□ 대  상 : 2019년 하반기 유수율 향상 추진실적 (‘19. 7. 1.~ 12. 31.)

□ 기  간 : 2020. 5. 6.(수)~ 5. 15.(금)

□ 점검자 : 2개조 편성(9명)

○ 1조 : 최성태, 노경철, (김영일, 최환수)

○ 2조 : 한현숙, 김영혁, 김일구, (김주연, 차경호)

□ 점검방법

○ 사업소 방문 점검(사업소별 2일간) : 코로나19로 최소 인원

○ 유수율 향상 추진실적 자료 검증 및 필요시 현장 확인

□ 주요 점검내용

○ 누수탐지 실적 / 수도사업 용수관리 / 원인자 누수제로화 추진관리

○ 배급수관 정비추진 실적 및 기존관 철거 / 불용관 정비 실적

○ 중블록별 공급량 분석관리 / 가압급수 지역 관리

○ 재개발․재건축 지역관리  / 유량계 및 유량감시시스템 관리

○ 철저한 요금심사(신개전 누락여부, 인정조정(6회 이상)수전 감소율 등)

□ 점검 항목 및 배점 : 16개 항목

구분	유수율 증 대	누 수 탐 지	배급수관 정비공사	불용관 정 비	누수복구 사후관리	중블록 공급량 분석관리	수도사업용수 관리	원인자누수 제로화 추진관리	재개발 재건축 지역관리	유량계 관 리	가압급수 관 리	중블록 유수율	조 례 위 반	철저한 요금심사	유수율 분석보고	유공 실적
배점 (100)	30	7	4	3	3	5	3	5	6	6	4	5	6	5	3	5

Ⅱ		점검 결과

1		유수율 증대실적(30점)

<목표달성도, 순위 및 증가실적>

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
① 목표(2019)	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
② 전년실적(2018년)	89.51	97.96	97.06	95.47	93.67	93.53	97.03	97.52
③ 올해실적(2019년)	89.87	98.67	97.60	95.44	94.27	95.64	98.60	96.76
④ 목표 달성도(③/①)	0.9880	1.0071	1.0017	0.9994	0.9962	1.0089	1.0108	0.9894
⑤ 유수율 순위	8	1	3	6	7	5	2	4
⑥ 전년대비유수율 증가(③-②)	0.36	0.71	0.54	-0.03	0.60	2.11	1.57	-0.76
⑦ 목표달성도 평가점수	9.77	9.96	9.91	9.89	9.86	9.98	10.00	9.79
⑧ 유수율 순위 점수	9.30	10.00	9.80	9.50	9.40	9.60	9.90	9.70
⑨ 전년대비유수율 증가 점수	9.50	9.80	9.60	9.40	9.70	10.00	9.90	9.30
가점사항	0.1	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	1.1	0.00
평가점수	28.67	30.00	29.71	29.09	29.26	29.88	30.00	28.79

2		누수 탐지(7점)

<탐지실적 및 기간제 근로자 관리>

구 분		소계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표	다점형	1,103	160	144	189	101	135	181	121	72
	일 반	497	69	65	84	48	60	80	56	35
보고 수량	다점형	664	133	116	108	38	82	97	56	34
	일 반	217	51	23	36	12	10	33	35	17
점검 수량	다점형	668	133	116	108	40	83	98	56	34
	일 반	230	61	23	36	12	13	33	35	17
차이 수량	다점형	4	0	0	0	2	1	1	0	0
	일 반	13	10	0	0	0	3	0	0	0
	감점(0.1)		0	0	0	0	0	0	0	0
실적 (전체)	다점형	1,361	222	160	243	122	185	206	133	90
	일 반	547	149	60	90	43	36	62	72	35
달성율(%)		119.3	162.0	105.3	122.0	110.7	113.3	102.7	115.8	116.8
가.감점			0.3	0	0.2	0.1	0.1	0	0.1	0.1
감점	취약지역		0	0	0	0	0	0	0	0
	보고기한		0	0	0	0	0	0	0	0
탐지실적 평가점수			6.3	6.0	6.2	6.1	6.1	6.0	6.1	6.1
기간제관리 점수	출퇴근관리		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	근무평가실시		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	교육실시		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
장비관리상태 (불용처리여부)			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
평가 점수			7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0

3		배급수관 정비공사(4점)

<정비추진실적 및 기존관철거율>

구분	정비목표	총계점수	추진실적(연장 m)						기존관철거(연장 m)
			소 계	단위 사업	연간가	GIS정	달성율	점수	단위 사업	달성도	점수
중부	20,700	2.1	12,739	7,543	2,707	2,489	61.5%	1.6	1,329	17.6%	0.5
서부	5,500	2.1	4,641	2,015	2,626	-	84.4%	1.6	902	44.8%	0.5
동부	19,600	2.1	12,922	8,072	4,850	-	65.9%	1.6	3,073	38.1%	0.5
북부	12,800	2.1	12,106	5,819	3,441	2,846	94.6%	1.6	1,334	22.9%	0.5
강서	12,000	2.1	9,326	4,639	4,567	120	77.7%	1.6	2,863	61.7%	0.5
남부	20,300	2.1	16,809	12,892	3,917	-	82.8%	1.6	3,979	30.9%	0.5
강남	15,000	2.1	11,711	6,032	2,776	2,903	78.1%	1.6	1,175	19.5%	0.5
강동	11,100	2.1	8,222	5,690	1,864	668	74.1%	1.6	876	15.4%	0.5

4		불용관 정비(3점)

<기존관 미폐쇄 및 발생 불용관 미정비 실적>

구 분	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
과년도 정비(가점)	0.3				0.3			0.3
과년도 불용관 미정비(감점)	-0.6	-0.2	-0.2				-0.4
현년도 불용관 미정비(감점)
평가 점수	2.7	2.6	2.8	3.0	3.0	3.0	2.6	3.0

5		누수복구 사후관리(3점)

<누수복구시 발견된 노후관 정비여부>

구 분	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
관리대장 누락(1점)	1	1	1	1	1	1	1	1
정비계획 수립(1점)	1	1	1	1	1	1	1	1
미정비된 노후관 정비율(1점)	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6
평가 점수	2.6	2.6	2.7	2.9	2.6	2.7	2.6	2.6

6		중블록 공급량 분석관리(5점)

<유량감시시스템에 의한 공급량 관리 여부>

구 분	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
공급량 미일치 건	6	6	6	3	4	6	6	6
월간보고서 미제출 건	3	0	0	0	3	6	0	0
고립여부 미기재 건	0	0	0	0	0	0	0	0
감점 계	-0.9	-0.6	-0.6	-0.3	-0.7	-1.2	-0.6	-0.6
평가 점수	4.1	4.4	4.4	4.7	4.3	3.8	4.4	4.4

구 분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
배수지 퇴수수위		0.95	0.81	0.8	0.52	0.54	0.43	0.52	0.84
퇴수수위 최적관리(3점)		1.79	2.12	2.14	2.79	2.74	3.00	2.79	2.05
감점	보고기일 미준수	-0.1	-	-0.3	-	-0.1	-0.4	-	-
	관리대장 미첨부	-	-	-	-	-	-	-	-
	대장항목 미기재	-	-0.1	-0.1	-	-	-0.2	-	-0.6
가점(자체분석등)		-	-	-	-	0.3	-	0.3	-
평가 점수		1.69	2.02	1.74	2.79	2.94	2.40	3.0	1.45

7		수도사업 용수 관리(3점)

<배수지 퇴수 수위 최적관리>

8		원인자 누수 제로화 추진관리(5점)

<제로화 추진계획 관련 추진내용>

구 분		소계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대형공사장 순찰점검(2점)			2	2	2	2	2	2	2	2
이설승인조건부여, 공문발송(1점)			1	1	1	1	1	1	1	1
증감율 (2점)	2019년		2	23	0	2	2	20	18	7
	3년평균		5	10.3	3	2.3	3.7	8	8	7.3
	점수		1.8	0	2	1.4	1.4	0	0	1.4
평가 점수			4.8	3.0	2.0	4.4	4.4	3.0	3.0	4.4

9		재개발, 재건축 지역관리(6점)

<재개발‧재건축 지역관리>

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계획 수립(2점)	2	2	2	2	2	2	2	5
관리 실태(3점)	3	3	3	3	1.5	3	3	3
GIS 입력 여부(1점)	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0
감점	-0.6	-0.6	-	-	-	-	-1.5	-
가 점	-	1.0	-	-	0.3	-	3.9	-
평가 점수	5.0	6.0	6.0	6.0	4.8	5.8	6.0	6.0

10		유량계 및 유량감시 시스템 관리(6점)

<구역‧중블록,아리수올림터·배수지 유량계>

구 분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유량계 관리(3점)	지적	2.4	3.7	3.3	0.6	2.1	4.6	1.2	0.3
	점수	2.94	2.90	2.89	2.97	2.88	2.85	2.96	2.97
유량시스템 관리(2점)	지적건수	4	9	4	3	1	5	7	0
	점수	1.90	1.75	1.87	1.86	1.94	1.83	1.75	2.00
고장처리 지연(1점)	지적건수	10	7	2	0	3	11	4	0
	점수	0.76	0.64	0.61	1.00	0.82	0.63	0.86	1.00
가점		0.16	0.15	0.01	0.2	0.11	0	0.11	0.2
평가 점수		5.76	5.44	5.38	6.00	5.75	5.31	5.68	6.00

11		가압급수 지역관리(4점)

<가압지역 유수율 과대.과소 해소 및 정확도 개선>

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
관리 대상	8	21	11	23	13	7	21	5
과대․과소	5	19	9	15	10	1	18	3
점수 2점	0.75	0.19	0.36	0.70	0.46	1.71	0.29	0.80
정확도 실적	10	9	16	12	5	6	4	5
점수 1점	1	0.9	1.0	1.0	0.5	0.6	0.4	0.5
달성도(%)	-50	-71	-64	-7	-17	57	-33	-38
점수 1점	0.5	0.3	0.4	1.0	0.9	1.3	0.7	0.7
평가 점수 (4점)	2.25	1.39	1.76	2.70	1.86	3.61	1.39	2.00

12		중블록 유수율 목표관리(5점)

<중블록 유수율 과대·과소 해소 및 목표관리>

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
관리대상	23	15	11	5	16	23	6	5
과대, 과소	9	2	0	0	3	6	0	0
편차 해소 (3점)	1.83	2.60	3.00	3.00	2.44	2.22	3.00	3.00
목표 관리 (1점)	1	1	1	1	1	1	1	1
대책수립및결과(1점)	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1
가점(자체계획 추진등)						1
평가 점수	3.33	4.10	4.50	4.50	4.44	5.00	5.00	5.00

13		조례위반 처분․추징실적(6점)

<하반기 조례위반 처분 건수 및 추징실적>

구 분		중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
추징량		50	0	30	0	0	7	98	0
점수(3점)		2.8	2.2	2.6	2.2	2.2	2.4	3.0	2.2
부과건수		30	11	20	7	24	39	7	15
점수(2점)		1.8	1.0	1.4	0.8	1.6	2.0	0.8	1.2
근무보고 미처리건수		0	0	0	0	0	0	0	0
점수(1점)		1	1	1	1	1	1	1	1
감점	미처리/미등재	0	0	0	0	0	0	0	0
가점	출장 복명	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.0	0.5
평가점수		6.0	4.8	5.6	4.6	5.3	6.0	4.8	4.9

14		철저한 요금심사(5점)

<하반기 전산 미심사 건수 및 인정조정 건수>

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
전산 미심사	72	23	10	408	0	12	6	485
점수(3점)	2.0	2.2	2.6	1.8	3.0	2.4	2.8	1.6
인정 조정	59	15	32	9	5	30	23	2
점수(2점)	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.5	1.6	2.0
가·감점	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2
평가 점수	4.1	4.2	4.5	3.8	5.0	4.1	4.5	3.8

15		유수율 분석(3점)

<공급량‧·조정량 분석보고 및 단위사업실적 보고 기일준수 여부>

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
보고기일 미준수(공급량)	0	1	0	0	0	1	0	0
보고기일 미준수(조정량)	0	0	0	0	0	0	0	0
보고기일 미준수(단위사업)	0	0	0	2	0	0	0	0
감 점	0	-0.1	0	-0.2	0	-0.1	0	0
평가 점수	3.0	2.9	3.0	2.8	3.0	2.9	3.0	3.0

16		유수율 유공실적(3)

○ 평가대상 : 사업소 자체적으로 추진한 업무실적(하반기 제출)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
제출 건수	11	1	1	2	1	2	2	1	1

※ 자체 심사위원회 평가결과에 따라 평가 점수 부여 및 표창장 상신

Ⅲ		점검결과 총평

○ 유수율은 전년대비 향상되었으며, 누수탐지 실적은 목표달성 초과하였으나, 배급수관 정비공사와 기존관 철거등에 대한 추진실적 관리 필요

○ 재개발, 재건축지역 추진사항을 GIS시스템에 등록하여 체계적으로 관리하도록 하고 있으나, 기본정보(사업명, 규모 등)에 대한 입력율은 95%이상으로 대체로 양호하나, 일부 수도사업소는 아직도 다소 저조하며 계속적인 관리 필요

○ 조례위반 처분‧추징 실적에 대한 사업소별 편차가 많고, 부과건수는 많으나 추징실적이 부진함(온정적인 처분에 기인한 것으로 사료됨) 건축 철거시점에 맞춰 공사현장 출장하여 조례위반 점검강화 필요

○ 요금 전산 미심사는 강서사업소 외에는 계속 발생되고 있어 꾸준한 관리 필요, 신개전 미처리는 해소되었고 인정조정 6회이상 수전 해소 지속적인 노력 필요

○ 유수율 향상 추진사업에 대한 지속적 관리와 2020년 유수율 향상 추진사업 평가항목에 대한 개선을 통해 유수율 유지관리를 위한 업무에 대한 지도 감독강화 필요(수도사업 용수량의 저수조 퇴수량 관련 등)

Ⅳ		행 정 사 항

○ 상반기 점검 결과와 하반기 점검결과를 종합하여 “2019년도 유수율 추진실적 종합평가 포상계획”수립 후 시상 : ‘20.5.28(목) 정례사업소장 회의시

붙임 : 1. 2019년 하반기 유수율 향상 추진실적 점검내역 1부.

2. 사업소 하반기 유공 실적 제출자료(11건) 1부.  끝.