문서번호	도시철도계획부-4444
결재일자	2020.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
이경훈		김동철	05/21 김용학
협조

「쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안」

용역 준공기한 연기 검토 보고

2020. 5.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

「쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안」

용역 준공기한 연기 검토 보고

「쉴드 TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안 용역」의 준공기한 연기에 대해 검토한 보고임

[관련근거 : 한터지학 제2020-189호(2020.5.21.)]

□ 용 역 개 요

❍	용역명	:	쉴드 TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안 용역
❍	용역기간	:	’18. 6. 1. ~ ’20. 05. 30
❍	용역사	:	(사)한국터널지하공간학회 대표 이석원
❍	계약금액	:	234,651,000원
❍	과업내용	:	쉴드TBM 주요공정에 대한 경제성 확보 방안 마련 친환경 공법 적용 등에 따른 사회적 편익 분석

□ 추 진 현 황

❍	'18.03.30	:	용역시행방침 수립
❍	'18.06.01	:	용역계약 체결
❍	'19.03.15	:	용역 중간 보고회
❍	'19.07.26	:	현장 실무자 의견교류 (장비분야)
❍	'19.08.23	:	현장 실무자 의견교류 (내역분야)
❍	'19.11.14	:	경제성 확보 방안에 대한 공청회 개최 (한국터널지하공간학회 정책포럼)
❍	'20.01.	:	쉴드TBM 공법에 대한 사회적 편익 분석 시행
❍	'20.04.	:	쉴드TBM 공법 활성화 방안에 대한 외부 자문
❍	'20.05.(현재)	:	용역결과에 대한 활용방안 검토(진행 중)

□ 보 고 내 용 (연기사유)

❍ 2020.1월부터 시행된 쉴드TBM 공법에 대한 사회적 편익 분석을 토론 및 자문회의 등을 거쳐 2020.5.31.까지 완료하고자 하였으나,

❍ 2020.3.22.~5.5.(44일간) 시행된 강도 높은 사회적 거리 두기 시행(코로나19 확산방지 대책)으로 각종 회의 및 과업추진에 지장을 초래하여 불가피하게 용역기간을 연장하고자 함.

□ 기간연장 개요 □

-	연기일수	:	30일
	당초) ‘18.6.1.~‘20. 5.31. → 변경) ‘18.6.1.~‘20. 6.30.
-	귀책소재	:	도시기반시설본부
-	지체상금	:	미 부 과
-	연기사유	:	강도 높은 사회적 거리두기 시행에 따른 용역기간 연장

□ 조 치 계 획

❍「쉴드 TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안 용역」을 아래와 같이 변경계약 의뢰하고자 함.

구 분	당 초	변 경	증․감
용 역 비	234,651,000원	234,651,000원	변경없음
용역기간	‘18.06.01~‘20.05.31	‘18.06.01~‘20.06.30	30일 연장

붙임 : 한국터널지하공간학회(공문) 1부.  끝.