문서번호	급수운영과-9418
결재일자	2020.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		북부수도사업소장
윤승구	최용진	유승효		05/21 박병권
협 조

2019년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 설치및보수공사(장기계속 단가계약) 설계변경(최종) 및 계약금액 조정 시행

북 부 수 도 사 업 소

2020.05.

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2019년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 설치및보수공사(장기계속 단가계약) 설계변경(최종) 및 계약금액 조정 시행

우리사업소에서 시행 중인 『2019년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 설치및보수공사(장기계속단가계약)』의 시공물량 증▪감 및 신규 공종 발생 등으로 설계변경 및 계약금액 조정이 요구됨에 따라 본부에 설계변경 심의를 요청하여 예산집행에 효율성과 적정한 공사집행을 도모하고자함.

	공사 현황

Ⅰㅊ

□ 공 사 명 : 2019년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 설치및보수공사(장기계속)

□ 공사기간 : 2019. 5. 30~ 2020. 5. 31

□ 공사개요 : 노후밸브교체(135개소) 및 제수변실설치및정비(112개소)

□ 도 급 자 : **************

□ 도 급 비

- 당초 : 金칠억원(₩700,000,000원)

- 변경 : 金육억구천칠백구만삼천원(₩697,093,000원)

- 감액 : 金이백구십만칠천원(₩2,907,000원)

※도급비 감액(0.4%)

	보고 내용

Ⅱㅊ

□ 설계변경 사유

- 토공, 부설공, 구조물공, 부대공, 포장공 등 시공물량 증․감 및 신규공종

발생에 따른 변경

- 산재보험료, 고용보험료, 퇴직공제부금 및 부지임대료 정산에 따른 변경

□ 시공물량 (증·감)현황                                  (단위:개소)

공 종	당 초	변 경	증 ▪ 감
노후밸브교체 (D80~300㎜)	135	95	감 40
제수변실 설치및정비 (80~300㎜)	112	128	증 16

- 세부변경 사항 : 따로붙임(설계변경 내역서)

□ 계약금액 변경(조정) 내역                                (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
합 계	700,000,000	697,093,000	감) 2,907,000
공급가액	636,363,637	633,720,909	감) 2,642,728
부가가치세	63,636,363	63,372,091	감) 264,272

□  공종별 변경내역	(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
토 공	89,411,188	74,390,402	감) 15,020,786
부 설 공	27,147,391	30,527,031	증) 3,379,640
구조물공	92,150,249	112,271,502	증) 20,121,253
포 장 공	12,540,388	10,674,748	감) 1,865,640
포 장 공	182,487,889	195,329,472	증) 12,841,583
사급자재비	44,445,931	51,008,713	증) 6,562,782

	조치 의견

Ⅲ

□ 계약심사과-659(2020.01.17.)『2020년 상수도사업 계약심사 추진계획』에 의거 붙임 설계변경 내역서에 대하여, 상수도사업본부(안전총괄과)에 계약금액 조정·검토 의뢰하여 공사 진행에  만전을 기하고자 합니다.

따로 붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.