문서번호	역사도심재생과-5463
결재일자	2020.5.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	도심정책팀장	역사도심재생과장	재생정책기획관		도시재생실장
김성자	이기원	조남준	양용택		전결 05/23 강맹훈
협 조

창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선공사

사업계획 변경 추진계획

2020. 5.

도시재생실

(역사도심재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선공사

사업계획 변경 추진계획

종로구청 요구사항에 따른 설계변경, 계약심사·실정보고·물가변동 승인사항 반영으로 공사비가 증가함에 따라 사업계획을 변경하여 추진코자 함

Ⅰ		사 업 개 요

○ 위   치 : 돈화문로, 서순라길, 낙원상가 하부, 돈화문로10·11길, 피마길

○ 사업기간 : ‘17.09 ~ ’20.08

○ 사 업 비 : 16,993백만원 (설계비 735, 공사비 15,258, 감리비 1,000)

○ 사업내용 : 도로정비(폭 1.5~22m, 연장 2,400m), 앵커설치(2동, 634㎡)

Ⅱ		추 진 실 적

도로정비		‘17.9~’18.10 : 기본 및 실시설계(동해종합기술공사) ‘18.05~10 : 행정절차 이행(가로수,디자인,문화재 심의 등) ‘18.12.26 : 공사착공(다이치종합건설, 천하건설) ‘19.05.17 : 공사 이관 및 중지요청(구→시) ※ 5.28 구자체 종결 ‘19.06 ~ : 관계기관 실무회의(종로구 설계변경 요구사항 검토) ‘19.08 ~ : 공사재개(낙원상가 하부, 돈화문로, 서순라길) ‘19.11.04 : 준공기한 연기(’19.12.31→‘20.8.31) ‘19.12~’20.3 : 동절기 보도공사 중지 ‘19.12.12 : 관계기관(시,구,도기본) 합동점검 ‘20.03 ~ : 공사재개 ‘20.05.21 : 사업계획 변경 요청(←도기본 토목부)
		1
앵커설치		‘17.12~’18.10 : 기본 및 실시설계(조진만건축사사무소) ‘18.08.16 : 뭐든지 생활문화지원센터(낙원상가) 조성 기본운영계획(문화정책과) ‘19.05.03 : 공사계약 ‘19.09.20 : 건축공사 착수 ‘19.10.24 : 준공기한 연기(’19.11.12→‘20.3.21) ‘20.03.20 : 공사준공(문화정책과에 시설물 인계)

Ⅲ		사업계획 변경

□ 변경사유

○ 종로구청 요구사항 및 현지여건 변동분(계약심사·실정보고·물가변동) 반영에 따른 ***************로 공사구간 축소

⇒ 축소구간 : 돈화문로11길, 피마길

- 종로구청 요구사항 설계반영

구분	주요 변경내용	비고
돈화문로	********************************** **************** ****************************** ******************************* ****************************************** ********************************* ********************************
서순라길	****************************************** **********************************
공통사항	********************************** ************************* ******************************* ************************************ ************************************

- 현지여건 변동분 반영

구분	주요 변경내용	비고
계약심사 승인	************************
실정보고 승인	*****************************
물가변동 승인	*****************************

□ 공사비 세부 변경내용

○ (토목)공사비 변경 현황 : 1,171백만원 증액           (단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계	******	******	*
도 급 비	*****	*****	*********
관급자재비	*****	*****	********
폐기물처리비	***	***	********
이전비 및 기타	*****	***	********

※ 이전비및기타 942백만원중 940백만원 사용예정(종로구230+돈화문로 이설비280+돈화문로10길 이설비430)

○ (토목)공사비 세부 변경내용                              (단위:원)

연번	구 분		금 액	비 고
1	***************		***********
2	**** *** **	*******	*************
		*******	***********
		*******	***********
3	*************		************
4	*********		************
5	*****		*************
6	*****		************
7	******		***********
계			*************

< 위 치 도 >

Ⅳ		검 토 의 견

○ 종로구청 요청사항 및 현지여건 변동 반영에 따라 사업비가 증가되나, 추가예산 미확보 및 준공기한을 고려할 때 사업계획 변경이 필요함.

- ******************************************

○ 이에, 기 확보된 예산범위내에서 공사구간을 축소하여 사업 추진

- 축소구간 : ************

※  역사도심재생과-5194(‘20.5.14) 관계기관 실무회의 결과 반영

※  토목분야 공사구간 축소에 따라 전기분야 공사내용 변경 예정

○ ***********************************************************

Ⅴ		향 후 계 획

○ ‘20.05 : 사업계획 변경 추진방침 통보 (→도기본 토목부,설비부)

○ ‘20.08 : 공사 준공

○ ‘20.09 : 준공 행사 개최 (구청 행사 병행)

붙임 : 1) 관계기관 실무회의 결과 1부.

2) 사업규모 변경 및 현지여건 변동분 목록 1부.  끝.