문서번호	교통운영과-8268
결재일자	2020.5.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★교통전문관		교통개선팀장	교통운영과장
박평근		김상훈	05/25 강진동
협조

「2020년 도로점용공사장」교통소통대책 자문회의 결과 보고(소위원회 제4차)

2020. 5.

교통운영과

「2020년  도로점용공사장」

교통소통대책 자문회의 결과 보고(소위원회 제4차)

제4차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회(소위원회)를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2020.5.21.(목), 14:00~16:50

○ 참석 위원 : 4명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 3명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : **********************

- 간  사 : 교통개선팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 4건

- 결  과 : 원안가결 1건, 조건부 시행 2건, 재심의 1건

□ 자문회의 결과

○ 공통사항

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

1) 세종대로 보행친화 공간 재편사업

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
세종대로	‘20.6~12 (203일)	24시간	1~2개차로	보행정책과

○ 자문결과 : 재심의

- 1단계(1-1) 보행자가 횡단보도 이용이 가능하도록 공사를 시행하기 바람

- 2단계(1-1) 공사구간이 두 개로 분리되어 공사를 시행하여 가로변의 버스정류소 운영시 용량 초과 및 교통정체가 우려되므로 공사 구간을 분리하여 시행하는 방안을 제시하기 바람

- 버스정류장 부분 공사시 버스 정차대수를 감안하여 공사구간의 적절한 단계 구분이 필요함

- 단계별 공기가 부족이 우려되므로 2개팀으로 구성하여 공사를 시행하기 바람(2개팀 운영시 서울역과 광화문에서 동시에 시행하는 방안 제시)

- 보도 공사시 보행도우미를 배치하기 바라며, 실제 투입 장비 제원을 표시하기 바람

- 공사시 완료 구간에 택시 및 관광버스 정차면을 운영하지 않기 바람

- 보도내와 차도내 공사를 분리하여 우선 보도내에서 가능한 공정을 진행하여 공기를 단축하는 방안을 제시하기 바람

- 2-1, 4-1, 4-2 구간 공사시 정체가 우려되므로 완료 후의 점유 면적만 점유하여 공사를 시행하기 바람(공사 완료후 면적을 초과 점유시 야간 공사로 변경하기 바람)

- 공사 시행전에 광역적으로 홍보를 하기 바람

- 권고 사항 1 : 숭례문 교차로의 국민은행 앞 보도 채움을 추가하기 바람

- 권고 사항 2 : 숭례문 교차로와 서울역 교차로의 곡선 구간은 중앙선을 밑으로 조정하여 구간 전체의 차로를 최대한 직선화하여 사고 예방에 도움이 되도록 하기 바람

- 권고 사항 3 : 시청앞 광장의 공유차량 정차면 구간의 보도 채움을 추가하기 바라며, 서울도시전시관 앞 횡단보도와 이면도로 간에 보도 채움을 추가하기 바람

2) 노들남북 고가차도 철거공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
노들로, 현충로	123일	24시간	4개차로	도시기반시설본부 토목부

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 2-1단계 공사시 주변지역까지 상당한 정체를 보이므로 유원아파트 교차로 및 노량진배수지교차로를 적극 활용하여 한강남단 교차로의 좌회전 금지하는 방안을 검토하기 바람(좌회전 금지시 3개 교차로에 대한 신호현시 조정, 최적화 등 주변지역의 교차로 신호운영 계획을 제시하기 바라며, 2개 교차로를 개선하여 회전 교통량 우회전략을 제시하기 바람)

- 공사시 광역적으로 우회처리 전략 및 홍보계획을 제시하기 바람

- 1-2단계 공사시 흑석동에서 고가차도 진입구간의 차로 및 보도를 조정하여 1개차로를 추가하기 바람

- 공사전에 노들로고가차도를 이용하는 교통량의 수요를 조절하기 위한 램프 폐쇄(미터링 전략)를 검토하기 바람(폐쇄시 사전에 폐쇄 램프 구간에 대한 현수막 등 홍보를 사전에 시행하기 바람)

- 단계별 철거장비 배치도를 제시하기 바람(점유면적에 대한 장비 배치도)

- 대형 크레인 등의 장비 배치에 따른 안전대책 수립 및 반출 계획도 제시하기 바람

- 공사 완료후에 남측에 횡단보도를 추가 설치하는 것을 검토하기 바람

3) 헌릉로 확장공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로 (점용폭)	사업 시행자
헌릉로	‘21.1 ~’23.4 (28개월)	24시간	1~2개차로	도시기반시설본부 토목부

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 교량 2, 3단계 공사시 도로의 여유공간이 있으므로 도로선형을 직선으로 유지하기 바람

- 5단계 공사시 하위차로의 우회전을 직우로 변경하여 공사를 시행하기 바람

- 10단계를 선시공하고 8단계를 다음에 공사하여 차로 선형을 직선으로 유지하기 바람

- 헌인마을 교차로의 분석을 재검토하기 바람

- 13, 14단계 버스 정차면에서 버스의 차로변경 구간이 짧으므로 테이퍼 및 보도를 조정하여 차로 변경 구간을 확보하기 바람

- 17, 18단계 하위차로의 차로 운영 계획을 일관성있게 시행하기 바람

- 21단계 도로 여유 공간이 있으므로 차로 운영계획을 조정하기 바람

- 4단계 공사시 보행자가 램프구간을 무단으로 통과할 우려가 있으므로 안전대책 수립 및 보행로를 확보하여 공사를 시행하기 바람

4) Y22 개발계획에 따른 지하철 환기구 2개소  이설공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
국제금융로, 여의나루로, 여의대로 6길	120일	24시간	1개차로	Y22프로젝트금융 투자 주식회사

○ 자문결과 : 원안 가결

- 의견없음

붙임 : 1. 자문위원 참석명단 1부.

2. 공사업체 참석명단 1부.  끝.