문서번호	방재시설부-7329
결재일자	2020.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설과장	방재시설부장
박용도	代김달용	05/25 박홍봉

『강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사』

조경공사 실정보고 검토보고

2020. 5.

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

『강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사』

조경공사 실정보고 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사』와 관련하여 금하마을 방음벽 재설치와 토목공사 계획 변경에 따른 조경공사 변경 실정보고 사항에 대하여 검토 보고 드림.

- 근거: 서영강남 20-134호(2020.5.20.)

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사

▢ 위    치 : 금천구 독산동~광명시 소하동~금천구 시흥동

▢ 규    모 : 도로개설 왕복 4~8차로, 연장 2.48Km

▢ 공사기간 : 2001.12.28. ~ 2020.5.31.

▢ 사 업 비 : 2020억원(조경 11.6억원)

▢ 감리사/도급사 : 서영엔지니어링/롯데건설(주)

(위 치 도)

Ⅱ		건설사업기술자 검토내용

▢ 검토배경

❍ 강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사 시행 중 금하마을 방음벽 재설치와 토목공사 계획변경에 따른 조경공사 식재계획 변경 및 준공정산의 적정성을 검토함.

▢ 추진경위

❍ '20.02.06. : 『강남순환도시고속도로(4공구)건설공사』지장수목 등 처리방안 협의.

도시기반시설본부<방재시설부-1741(2020. 2. 6)> → 금천구청

❍ '20.02.18. : 강남순환도시고속도로 건설공사 지장수목 등 처리방안 의견 회신.

금천구청<공원녹지과-3120(2020. 2. 6)>→ 도시기반시설본부

❍ '20.02.19. : 지장수목 등 처리방안 협의결과 알림 <도시기반시설본부-20-1971(2020. 2. 19)>

- 내  용 : 금하마을 방음벽공사로 인한 왕벚나무 전지 및 제거에 따른 녹지복구 계획 제출 요청.

❍ '20.03.04. : 강남순환로(4공구)관련 금하지하차도 상부공사(방음벽, 보도설치) 협조 요청.

금천구청<도로과-3469(2020. 3. 4)>→ 도시기반시설본부

- 내  용 : 보도 및 띠녹지 조성 요청.

❍ '20.03.26. : 지장수목 처리방안 협의 결과 알림.<도시기반시설본부-20-3689(2020. 3. 26)>

- 내  용 : 방음벽 공사에 따른 녹지복구계획 승인.

❍ '20.04.21. : 지장수목 처리방안 협의 결과 알림.<토목부-8038(2020. 4. 21)>

- 내  용 : 지하차도시점부, 보도육교하부 잔디식제계획 제출.

❍ '20.04.29. : 조경공사 검토 요청(강남순환 4공구)회신.

<금천구, 공원녹지과-8767(2020. 4. 30)>

-  내  용 : 지하차도시점부, 보도육교하부 조경계획 회신.

❍ '20.05.11. : 강남순환도시고속도로(4공구) 지장수목 관련 주민협의체 요청 사항 알림.

<금천구, 공원녹지과-9308(2020. 5. 11)>

- 내  용 : 금하마을 왕벚나무 제거를 존치요청 및 그에 따른 느티나무 대체 취소.

❍ '20.05.18. : 예비준공검사 조경 보완요청사항<금천구, 공원녹지과(2020. 5. 18)>

- 내  용 : 박미지하차도 상부 미식재구간 식재.

▢ 실정보고 근거

❍ 공사계약 일반조건 제19조(설계변경등)

①항 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우.

4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우.

▢ 실정보고 검토내용

① 금하마을 구간의 방음벽 철거, 재설치에 따른 지장수목 처리 및 복구계획

▶ 변경사유

- 금하마을 구간의 기존 방음벽을 금천구청의 요청에 따라 철거 및 재설치 과정에서

- 지장되는 은행나무 등을 제거 및 이식이 필요하여 반영(금천구청 공원녹지과 요청사항 반영)

- 방음벽 재설치로 인한 왕벚나무 전정 및 관목류 이식(주민협의체 요청사항 반영하여 왕벚나무 존치 후 전정)

- 방음벽 재설치로 인해 배면 녹지대 복구식재 필요

- 보도신설에 따른 보차도 띠녹지 구간에 가로수 왕벚나무와 관목 및 잔디 식재 반영(금천구 도로과 요청 및 주민협의체 협의사항 반영)

▶ 금하마을 가로수 계획도 및 복구도 - 1

▶ 금하마을 가로수 계획도 및 복구도 - 2

▶ 금하마을 가로수 계획도 및 복구도 - 3

▶ 주요 물량 증(감) 현황

공 종		단위	당 초	변 경	증·감	비고
1) 금하마을 가로수
① 왕벚나무	H4.0xR12	주	0	29	29
② 황금사철나무	H1.0xW0.3	주	0	1,630	1,630
③ 화살나무	H1.0xW0.6	주	0	500	500
④ 잔디	0.3x0.3	㎡	0	260	260

공 종		단위	당 초	변 경	증·감	비고
2) 방음벽 배면 복구
① 스트로브 잣나무	H2.5xW1.2	주	0	19	19
② 꽃사과	H3.5xR10	주	0	14	14
③ 청단풍	H3.5xR12	주	0	10	10
④ 홍단풍	H3.0xR10	주	0	3	3
⑤ 자산홍	H0.3xW0.3	주	0	1,640	1,640
⑥ 흰말채나무	H1.0xW0.4	주	0	560	560
⑦ 왕벚나무 전정	B11~30	주	0	38	38
⑧ 은행나무 이식	B17~26	주	0	12	12

② 토목공사 계획변경에 따른 지하차도 시점부, 금하마을 보도육교 하부 조경계획 건

▶ 변경사유

- 토목공사 변경에 따라 지하차도 시점부 교통섬에 녹지조성 필요(금천구 공원녹지과 요청사항 반영)

- 금하마을 보도육교 하부 녹지 조성 필요(금천구 공원녹지과 요청사항 반영)

▶ 지하차도(시점부) 조경계획

▶ 금하마을 보도육교 하부 조경계획

▶ 주요 물량 증(감) 현황

공 종		단위	당 초	변 경	증·감	비고
1) 지하차도(시점부)
① 소나무	H4.5xW2.0xR18	주	0	9	9
② 왕벚나무	H4.0xR10	주	0	6	6
③ 황금사철나무	H1.0xW0.3	주	0	250	250
④ 산철쭉	H0.3xW0.3	㎡	0	400	400
2) 보도육교 하부
① 소나무	H5.5xxW2.5xR25	주	0	13	13
② 왕벚나무	H4.0xR10	주	0	13	13
③ 황금사철나무	H1.0xW0.3	주	0	750	750
④ 백철쭉	H0.3xW0.3	주	0	2,100	2,100
⑤ 산철쭉	H0.3xW0.3	주	0	2,000	2,000
⑥ 꽃잔디	8cm	본	0	4,100	4,100
⑦ 맥문동	8cm	본	0	3,200	3,200

③ 금하 지하차도 상부 토목공사 변경에 따른 수목물량 증(감) 건

▶ 변경사유

- 금하지하차도 상부(시흥사거리 남측)의 토목공사 변경에 따라 조경계획 변경

- 조경면적 감소에 따른 잔디 물량 감소

▶ 금하 지하차도 상부 (당초)

▶ 금하 지하차도 상부 (변경)

▶ 주요 물량 증(감) 현황

공 종		단위	당 초	변 경	증·감	비고
① 소나무	H5.5xW2.5xR25	주	8	10	2
② 소나무	H4.5xxW2.0xR18	주	11	14	3
③ 주목(둥근형)	H0.4xW0.4	주	200	0	200
④ 회양목	H0.3xW0.3	주	0	900	900
⑤ 백철쭉	H0.3xW0.3	주	1,000	600	400
⑥ 잔디(평떼)	0.3x0.3x0.03	㎡	1,968	450	1,518

④ 박미 지하차도 상부 조경계획 건

▶ 변경사유

- 박미 지하차도 상부의 녹지조성 필요(금청구청 요청사항)

- 지하차도 상부의 낮은 토심으로 인하여 관목과 잔디로 식재

▶ 박미 지하차도 상부

▶ 주요 물량 증(감) 현황

공 종		단위	당 초	변 경	증·감	비고
① 회양목	H0.3xW0.3	주	0	200	200
② 조팝나무	H0.8xW0.4	주	0	180	180
③ 자산홍	H0.3xW0.3	주	0	240	240
④ 잔디(평떼)	0.3x0.3x0.03	㎡	0	220	220

⑤ 16차분 준공정산 건

▶ 변경사유

- 금번 실정보고 내용을 포함한 전체공사 시공물량 준공정산 산출, 반영

▶ 주요 변경 현황

(단위 : 천원)

공 종	단위	당 초	변 경	증·감	비고
1) 본선 당초 식재
① 이식(향나무 외 34주)	식	1	0	-1
② 식재(소나무 외 3,482주, 식생매트 1,223㎡)	식	1	0	-1
공 사 비		200,800	0	-200,800
2) 지하차도(시점부) 식재
① 식재(소나무 외)	주	0	1,565	1,565
공 사 비		0	24,900	24,900
3) 보도육교 하부 식재
① 식재(소나무 외)	주	0	7,816	7,816
공 사 비		0	101,500	101,500
4) 금하마을 가로수 계획도 및 복구도
① 식재(왕벚나무 외)	주	0	2,159	2,159
② 이식(은행나무 외)	주	0	992	992
③ 제거(은행나무 외)	주	0	1,408	1,408
④ 전정(왕벚나무 외)	주	0	38	38
⑤ 복구(스트로브잣나무 외)	주	0	7,135	7,135
공 사 비		0	112,100	112,100
5) 금하 지하차도 (상부) 식재
① 식재(소나무 외)	주	5,637	6,142	505
공 사 비		92,100	73,500	-18,600
6) 박미 지하차도 (상부) 식재
① 식재(조팝나무 외)	주	0	420	420
공 사 비		0	6,900	6,900
총 공 사 금 액		292,900	318,900	26,000

▢ 공사비 검토

① 적용기준

· 조경공사 설계대가기준(서울특별시 도시기반시설본부)

· 건설공사 표준품셈(건설연구원)

② 단가적용 검토

· 기존비목 : 기계약 단가 적용

· 신규비목 : 신규단가 × 협의율 84.64% 적용

▢ 공사비 산출대비

(단위 : 원)

구 분	소 요 공 사 비			비고
	당 초	변 경	증 · 감
순공사비	235,260,813	247,293,388	12,032,575
제 잡 비	57,639,187	71,606,612	13,967,425
총공사비	292,900,000	318,900,000	26,000,000

▢ 검 토 결 과

◦ 금하마을 기존 방음벽 철거 후 재설치에 따른 지장수목 처리 및 녹지복구, 지하차도 시점부, 보도육교 하부 녹지대, 금하지하차도 상부, 박미지하차도 상부에 대한 금천구청과 금하마을 주민협의체 요청에 관한 도급사의 실정보고 수량 및 공사금액을 검토한 결과 상기안과 같이 설계변경 시행함이 타당하다고 판단되며,

◦ 산정 반영된 공사비는 추후 설계변경 시에 반영하고자 함.

Ⅲ		보고자 의견

▢ 강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사 관련 금하마을 주변 방음벽 철거등으로 인한 조경계획 변경, 지하차도 시점부, 보도육교 하부 녹지대, 금하지하차도 상부, 박미지하차도 상부 등에 대한 자치구와 주민들의 요청에 대한 실정보고 건으로

▢ 실정보고 내용은 대하여 자치구 및 금하마을 주민들의 의견을 검토하여 수용한 사항임.

▢ 위 실정보고 사항에 대하여 건설사업관리기술자의 검토 의견이 타당하므로 승인 처리하고, 추후 설계 변경에 정산·반영하도록 책임건설사업관리기술자에게 통보하고자 함.

붙임: 관련공문 1부. 끝.