실정보고 검토서

공사명

강남순환도시고속도로 4공구 건설공사

공사개요

· 위    치: 금천구 독산동~소하동 JCT

· 규    모: 폭4~8차로, 연장 2.48㎞

· 공사기간: ’01.12.29.~’20.5.31.

· 도 급 비: 202,020백만 원

· 시공사: 롯데건설(주)

· 감리단: ㈜서영엔지니어링

· 설계사: ㈜서영엔지니어링

실정보고 건명

호암대교 외 공용 구간 교통안전시설물 보수

실정보고

사유

강남순환로 개통(’16. 7. 3.) 이후 호암대교 외 공용 구간에 대한 준공 전 점검결과 교통안전시설물 보수 요청 사항 반영

※ 관련문서: 도로시설과-5722(2020. 5. 13.)

건설사업관리단

검토의견

시설물 합동점검 결과에 따라 공용 중인 구간에 대한 교통안전시설물 보수 수량 및 공사비 산정이 적정함.

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	- - - -	델리네이터 137EA 시선유도봉 183EA 차선도색 28,859m 충격흡수시설 2개소	증) 137EA 증) 183EA 증) 28,859m 증) 2개소
금액	-	49,700,000	증) 49,700,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

강남순환로 개통 이후 공용되어 파손된 교통안전시설물 보수 비용 반영에 대한 건설사업관리단의 실정보고는 적정함.

비 고

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

05/25

김용제