문서번호	정수시설과-3893
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	김석정	05/26 김중영
협 조
	주무관		김영후

천정패널 설치 등 시공물량 증감에 따른 실정 보고(관리본관 시설개선공사)

2020. 05.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

천정패널 설치 등 시공물량 증감에 따른 실정보고

관리본관 시설개선공사와 관련하여 천장패널 설치 등 시공물량 증감에 따른 실정 보고임

□ 공사 현황

○ 공사명 : 관리본관동 1층 및 지하식당 등 시설개선 공사

○ 도급액 : 83,672,000원

○ 도급자 : 윤화이앤씨(주) 대표 김경숙

○ 착공일 : 2020년04월09일

○ 준공일 : 2020년07월01일(예정)

□ 보고 내용

○ 천장패널 설치 감소

- 당초 383.63㎡

- 변경 347.13㎡(식당 창고 천장 36.5㎡ 시공제외)

○ 현황 사진

식당 창고 시공제외 부분	식당 창고 시공제외 부분	비 고

○ 벽체 타일 설치 감소

- 당초 67.45㎡

- 변경 65.11㎡(주방 후드부 2.34㎡ 시공제외)

○ 현황 사진

후드 벽면 시공제외 부분	후드 벽면 시공제외 부분	비고

○ 바닥 타일 설치 감소

- 당초 51㎡

- 변경 48.65㎡(주방 바닥 트렌치 2.35㎡ 시공제외)

○ 현황 사진

주방바닥 시공제외 부분		주방바닥 시공제외 부분	비고

○ 타일 자재비 누락 반영

- 당초 0㎡

- 변경 벽체(도기질) 65.11㎡, 바닥(자기질) 48.65㎡

○ 마루 설치 감소

- 당초 39.24㎡

- 변경 36.61㎡(여자공무실 2.63㎡ 시공제외)

○ 현황 사진

여자공무실 시공제외 부분	여자공무실 시공제외 부분	비고

○ 인테리어 필름 시공 반영

- 당초 0㎡

- 변경 4.02㎡(남자공무실 및 응접실 4.02㎡ 시공)

○ 현황 사진

남자공무실 및 응접실 부분		남자공무실 및 응접실 부분		비고

○ 시공물량 증감

구분	천장 패널	벽체타일	바닥타일	마루설치	인테리어필름	비고
당초	383.63㎡	67.45㎡	51㎡	39.24㎡	0㎡
변경	347.13㎡	65.11㎡	48.65㎡	36.61㎡	4.02㎡

○ 공사비 증감

구분	당초	변경	감액	비고
도급비	83,672,000원	75,844,000원	7,788,000원

□ 조치 계획

○ 현장여건에 따른 시공물량 증감사항이 발생되었기에 향후 설계변경 및 기성 반영조치 코자함.

붙임 : 실정보고용 설계서 1부.  끝.