투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	2020년 남산공원 산사태 예방공사 설계변경 시행 및 준공기한 연기 요청

1. 녹지관리과-1700호(2020.5.26.)와 관련입니다.

2.『2020년 남산공원 산사태 예방공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

1) 사 업 명: 2020년 남산공원 산사태 방공사

2) 사업기간: 2020. 3. 30. ~ 5. 28.

3) 도 급 자: **************

4) 도급금액: *********

나. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총공사비		***********	***********	***********
도급비	계	***********	***********	************
	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
관급자재비		**********	*	***********

1) 설계변경 사유 : 현장여건 변경 및 시공방법 보강에 따른 설계변경

2) 예산과목 : 중부공원녹지사업소 녹지관리과, 산림안전관리, 산림재해방지, 산림내 사면 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(푸른도시국 산지방재과)

다. 준공기한 연기

1) 기한연기

- 당 초 : 2020. 3. 30. ~ 5. 28.

- 변 경 : 2020. 3. 30. ~ 6. 20.(23일 연기)

2) 연기사유 : ********************************************************************************

3) 귀책소재 : 발주처(지시사항)

4) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	녹지관리과장
주무관	최한수		녹지관리팀장	김한섭		녹지관리과장	05/26 권종화
협조자	재무팀장	박종환
시행	녹지관리과-1704	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 중부공원녹지사업소 (예장동) 녹지관리과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5944	/전송	02-3783-5949	/	halyanga@seoul.go.kr	/	부분공개(7)