코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	노원구청장(복지정책과장)
(경유)
제목	2020년 확정 기능보강사업 변경요청 결과 통보(월계)

1. 노원구 복지정책과-11942(2020.5.4.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 신청한 ’20년 종합사회복지관 확정 기능보강사업 변경 요청 건에 대하여 아래와 같이 승인하오니, 결정 세부내용은 [붙임]을 참고하시어 향후 사업 절차 이행 등 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시설명 : 월계종합사회복지관(노원구)

나. 사업명 : 조리제빵 교실 환경개선 공사

다. 변경신청 내역

(단위:천원)

사업명	기 존			변 경			증 감
	예 산		내 용	예 산		내 용
조리제빵교실 환경개선공사	시비	55,787	- 건축공사 - 가스공사 - 전기공사 - 잡철공사 - 싱크대 구입 - 주방기구 구입	시비	55,501	- 건축공사 - 전기공사 - 싱크대 및 주방기구 구입	△408
	구비	23,908		구비	23,786
	자부담	-		자부담	-
	총액	79,695		총액	79,287

라. 검토결과 : ‘승인’

- 공사 성격상 동일구조물 단일공사로 시공이 가능한 공사는 통합하여 발주하고, 계획대비 추진시 당초 확정된 사업비 내에서 추가·변경하고자 하며

- 종합적으로 검토한 결과 사업계획 변경이 당초 사업목적과 부합하므로 사업집행의 효율성과 예산절감 효과 등을 감안하여 원활하게 추진될 수 있도록 사업계획 승인함.

- 총 사업비 : 79,695천원 → 79,287천원(△408천원)

붙임 : 1. 2020년 확정 기능보강사업 변경 계획[월계] 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박슬기		복지시설팀장	서해경		지역돌봄복지과장	05/26 하영태
협조자
시행	지역돌봄복지과-10796	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02) 2133-7389	/전송	02) 2133-0719	/	psgg216@seoul.go.kr	/	부분공개(5)