문서번호	시설과-1682
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
황은애	하종식	박종수	05/26 최현실
협 조
	공원운영과장		배기선

「보라매공원 산책로 주변 녹지정비공사」

설계변경(정산) 검토보고

2020. 5.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

「보라매공원 산책로 주변 녹지정비공사」

설계변경(정산) 검토보고

우리 사업소에서 추진 중인「보라매공원 산책로 주변 녹지정비공사」와 관련하여 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보라매공원 산책로 주변 녹지정비공사

○ 공사기간 : 2020. 4. 1 ~ 5. 30

○ 총공사비 : *********************************

*******************************************

○ 도 급 자 : **************

○ 공사내용 : 수목 및 초화류 식재, 계단 및 데크 정비, 수목전지 등

□ 설계변경 내용

(단위 : 원)

구분	설계변경 내용	비고
철거공	▷ 기존 목계단 및 데크 현장여건에 맞추어 철거물량 조정 - 진입로계단 철거(H200): 1 → 0식 - 진입로계단 철거(H150): 0 → 1식 - 데크 철거(150×T21): 19.8 → 0㎡ - 데크 철거(150×T50): 0 → 19.8㎡ ▷ 기존 등의자 상태가 양호하여 존치 - 등의자 철거 : 10 → 0개소	감321,251
식재공	▷ 기존 녹지 현장여건에 맞추어 마사토 반입물량 조정 - 신재기반 토양개량(H100) : 1,852.9 → 1,292.3㎡ ▷ 현장여건에 맞추어 식재수량 조정 및 식재면적 증가로 추가 물량 반영 - 남천(H1.0×3가지) : 780 → 400주 - 말채 윈터뷰티(H0.4) : 670 → 720주 - 병꽃나무 나나푸르푸레아(H0.4) : 500 → 580주 - 뿔남천(H0.4) : 400 → 0주 - 말발도리 스트로브베리필즈(H0.4) : 0 → 400주 - 고광나무 버지널(H0.4) : 230 → 280주 - 매자나무 바가텔레(H0.4) : 430 → 580주 - 백철쭉(H0.3×W0.3) : 430 → 580주 - 산철쭉(H0.3×W0.3) : 430 → 580주 - 이테아(H0.4) : 430 → 580주	증12,406,743

구분	설계변경 내용	비고
	- 회양목(H0.3×W0.3) : 1,040 → 1,840주 - 자산홍(H0.3×W0.3) : 0 → 200주 - 대사초 골든라이트(8㎝) : 3,000 → 3,300본 - 아이스댄스(10㎝) : 1,660 → 1,720본 - 옥잠 블루엔젤(20㎝) : 1,150 → 1,370본 - 옥잠 어거스트문(20㎝) : 500 → 600본 - 옥잠 퍼스트프레스트(20㎝) : 500 → 600본 - 왕아주가(8㎝) : 2,580 → 2,730본 - 맥문동(3-5분얼) : 3,250 → 5,750본 - 송악(8㎝) : 3,350 → 3,500본 - 수호초(10.2㎝) : 3,600 → 3,750본 - 백합 나보나(8㎝) : 1,960 → 2,070본 - 초화류 식재(기존 비비추,원추리 지급) : 0 → 2,000본	증12,406,743
활엽수 전정	▷ 하부식생의 원활한 생육 및 수형 조절을 위한 교목 전정 - 가로수약전지(B11~B21미만) : 0 → 4주 - 가로수약전지(B21~B31미만) : 0 → 28주 - 가로수약전지(B31~B41미만) : 0 → 32주 - 가로수약전지(B41~B51미만) : 0 → 10주 - 가로수약전지(B51이상) : 0 → 1주	증6,434,636
시설물	▷ 기존 목계단 및 데크 현장여건에 맞추어 물량 조정 및 오일스테인 도색 물량 반영 - 진입로계단(1700×300×H150×20.1m) : 1 → 0식 - 진입로계단(1700×350×H150×20.4m) : 0 → 1식 - 데크 교체(150×T30): 19.8 → 0㎡ - 데크 철거(150×T50): 0 → 19.8㎡ - 오일스테인칠(2회) : 594.2 → 1,210.6㎡ - 등의자 재도색(2회) : 0 → 10개소 - 야외탁자 재도색(2회) : 0 → 12개소 - 데크 방부경계목 설치(100×50) : 0 → 50개소 ▷ 수목표찰 추가 - 수목표찰(지지형,H700) : 0 → 215EA	증9,001,219
폐기물	▷ 현장여건에 맞추어 폐기물 운반 및 처리 물량 조정 - 혼합폐기물(폐목재) 운반 : 5.34 → 4.32ton - 혼합폐기물(폐목재) 처리 : 5.34 → 4.32ton	감58,609
관급자재	▷ 현장여건에 맞추어 식재수량 조정 및 식재면적 증가로 추가 물량 반영 - 대사초 골든라이트(8㎝) : 3,000 → 3,300본 - 아이스댄스(10㎝) : 1,660 → 1,720본 - 옥잠 블루엔젤(20㎝) : 1,150 → 1,370본 - 옥잠 어거스트문(20㎝) : 500 → 600본 - 옥잠 퍼스트프레스트(20㎝) : 500 → 600본 - 왕아주가(8㎝) : 2,580 → 2,730본 - 맥문동(3-5분얼) : 3,250 → 5,750본 - 송악(8㎝) : 3,350 → 3,500본 - 수호초(10.2㎝) : 3,600 → 3,750본 - 백합 나보나(8㎝) : 1,960 → 2,070본 ▷ 기존 등의자 상태가 양호하여 존치 - 등의자(1600×568×H765) : 10 → 0개소	증472,750

□ 공사비 증감

(단위 : 원)

구 분	소 요 금 액			비고
	당 초	변 경	증 / 감
총 공 사 비	***********	***********	**********
도 급 공 사 비	***********	***********	**********
관 급 자 재 비	***********	***********	*******

□ 예산집행내역

(단위 : 원)

예산액 (a)	설계용역 (b)	공사비 (c)	관급자재 (d)	예산잔액 [a-(b+c+d)]	비고
***********	**********	***********	***********	**********

‣ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 보라매공원시설물정비, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 검토의견

○ 추가 공사금액은 예산잔액을 활용하여 설계변경(정산) 시행

○ 상기 설계변경 사항을 반영하여 계약부서에 변경 계약 요청

붙  임 : 1. 변경내역서 1부

2. 제비율 검증확인서 1부. 끝.