실정보고 검토서

공사명

강남순환도시고속도로 4공구 건설공사

공사개요

· 위    치: 금천구 독산동~소하동 JCT

· 규    모: 폭4~8차로, 연장 2.48㎞

· 공사기간: ’01.12.29.~’20.5.31.

· 도 급 비: 202,020백만 원

· 시공사: 롯데건설(주)

· 감리단: ㈜서영엔지니어링

· 설계사: ㈜서영엔지니어링

실정보고 건명

금하지하차도 종배수관 터파기 토사 소운반 반영

실정보고

사유

종배수관 터파기 토사에 혼합폐기물이 혼재된 매립토이므로 선별을 위한 임시야적장으로 소운반 및 금하마을 진출입로에 부설되는 배수관 터파기 최소화를 위한 가시설 시공

건설사업관리단

검토의견

금하지하차도 배수관 터파기 토사는 매립토로써 혼재된 폐기물의 선별을 위해 소운반하여야하고, 금하마을 앞 우수BOX 연결배수관 터파기 가시설 설치는 적정함.

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	- - - 사토 처리 7,137m3 되메우기 10,242m3	매립토 소운반 21,088m3 폐기물 선별 10,925m3 SK가시설 15m - 되메우기 10,163m3	증) 21,088m3 증) 10,925m3 증) 15m 감) 7,137m3 감) 79m3
금액	174,700,000	150,700,000	감) 24,000,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

금하지하차도 종배수관 터파기 최소화를 위한 가시설 설치 및 터파기한 토사에 혼합폐기물이 혼재되어 선별을 위한 소운반 반영에 대한 책임건설사업기술인의 실정보고 내용은 적정함.

비 고

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

05/27

김용제