문서번호	시설과-2072
결재일자	2020.5.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
박상권	송병욱	신용철		05/27 구아미
협 조
	기전설비과장		조성태
	시설팀장		최이영

『수유6배수지 건설공사』

건설공사 공사기간 연기 검토 보고

2020. 5.

시설관리부

[시 설 과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『수유6배수지 건설공사』관련

건설공사 공사기간 연기 검토보고

수유6배수지 지역주민 민원요청 사항 등을 반영하기 위한 추가공사에 필요한 공기연장 검토내용을 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 수유6배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000㎥ → 6,100㎥)

송배수관 부설 D=500~600㎜, L=990m

○ 공사기간 : 2017.12.13. ~ 2020. 5.30.

○ 도 급 비 : 2,861백만원(4차 : 208백만원)

○ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사  대표 손병회

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사  대표 이상민

○ 년도별 사업추진현황

- 2018년 : 배수지 증설(3,000㎥ → 6,100㎥)

- 2019년 : 송배수관 D=500~600㎜, L=990m

- 2020년 : 조경 및 부대공사

공기연장

○ 공기연장 : 16일 (← 시공사 : 16일 요청)

○ 계약변경기간

- 당초 : ’17.12.13. ~ ’20. 5. 30.

- 변경 : ’17.12.13. ~ ’20. 6. 15(증, 16일)

※ ’20년 4차공사 착수일 : ’20. 01. 01.

○ 주요연장 사유

- 배수지 상부 체육시설 배드민턴장 이용 주민들로부터 노면정리 및 경계석 재설치 등 민원 요구사항 처리를 위한 공사기간 반영

- 배수지 인접주택 사생활 보호를 위한 차폐 수목식재 기간 반영

***********************

- 여름철 수방대비 배수지 상부 우수배제시설 보완을 위한 공사기간 반영

지역주민 현장방문(5.26)	배수지 인접주택 수목 식재요청

공기연장 검토 내용

○ 배수지 상부에 설치 예정인 배드민턴장 이용 주민 요구사항인 노면 정리 및 배수지 인접빌라 사생활 보호용 차폐 수목 식재, 여름철 수방대비 배수지 상부 우수배제시설 보완에 소요되는 부족공기 16일 요청에 대한 검토결과 적정함.

- 배수지 공사로 철거후 재설치 예정인 배드민턴장 노면정리 및 주위 경계석 원상복구를 위한 소요공기 반영(8일)

- 배수지 주변 빌라 사생활 보호를 위한 차폐 수목 식재기간 반영(4일)

- 여름철 배수지 수방대비 우수배제시설 보완공사를 위한 소요공기 반영(4일)

적용공기 산출

○ 전체공사

- 당초 : 2017.12.13. ~ 2020.05.30.

- 변경 : 2017.12.13. ~ 2020.06.15.(증16일)

○ 4차공사(진행중 공사)

- 당초 : 2020.01.01.~ 2020.05.30.

- 변경 : 2020.01.01. ~ 2020.06.15.(증16일)

※ 감리 투입기간은 변경없이 가능(계약기간 2020. 7. 4)

조치의견

○ 현재 진행중인 수유6배수지 건설공사의 공사기간을 2020. 6.15.까지 연기(16일 연기)하여 배수지 공사로 인한 여러 불편사항(분진․소음․진동․주차문제등)을 감수한 지역 주민들의 민원 요구사항을 적극 반영해 해결코자 하며, 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적 공급을 위한 배수지 세척 및 통수작업도  차질없이 추진하고자 함

붙임  실정보고 관련서류 1부.  끝