문서번호	설비부-7574
결재일자	2020.5.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		代곽용길	05/27 임정규
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

도급공사 및 관급자재 준공기한 연기검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 05.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

도급공사 및 관급자재 준공기한 연기검토 보고

『중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사』관련 기존 MDF(Micro Disc Filter) 유입관로 누수발견에 따른 선행공종 연기에 따라 건설사업관리단으로부터 전기공사(도급,관급) 연기요청이 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 준공기한 연기요청 검토보고

[중랑감 제20-254(2020.05.26.)호]

중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 관급자재 납품기한 연기요청

[중랑감 제20-255(2020.05.26.)호]

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사

공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64번지 일원 (중랑물재생센터 내)

계약현황

구분	계약금액(원)	계약기간	비고
총차	*************	*********************
1차	***********	*********************	준공
2차	*************	*********************

도 급 사 : ㈜제이앤제이파워스 외 2개사

감 리 사 : ㈜천일 외 3개사

Ⅲ
		검토내용

준공기한 연기(도급)

○ 준공기한 연기 요청사항

구분	변경 전	변경 후	비고
**	*********************	*********************
**	*********************	*********************

○ 연기사유

- 총인처리시설 유ㆍ출입관로 터파기 시 기존 MDF시설 유입관로의 누수가 발견되어 기존 유출입 관로 개량에 따른 선행공정(토목) 연기사유 발생

○ 귀책소재 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 : 미부과

○ 건설사업관리단 검토의견

- 기존 MDF시설 유입관로 개량을 위한 선행공정인 토목공사 기간 연장에 따라 후속공정인 전기공사의 절대공기 부족으로 준공기한을 ’20.11.30.까지 연장함이 타당함

납품기한 연기(관급)

○ 납품기한 연기 요청사항

구분	계약자	계약금액(원)	납품기한
			변경 전	변경 후
**** ****	****	*************	***********	***********
*******	*****	**********	***********	***********
******	******	**********	***********	***********

○ 연기사유

- 토목공사 공기연장에 따라 전기공사 준공기한을 2020.11.30.까지 연기 예정인 바, 관급자재 설치 시기 미도래에 따라 납품기한 연기 필요

○ 귀책소재 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 : 미부과

○ 건설사업관리단 검토의견

- 선행공정인 토목공사 기간 연장 및 전기공사 준공기한 연기조치에 따라 관급자재 설치 시기 미도래로 관급자재 납품기한을 연기함이 타당함

Ⅳ
		조 치 계 획

건설사업관리단 검토결과 도급공사 준공기한 연기 및 관급자재 납품기한 연기가 필요하다고 보고되었기에, 계약부서(총무부) 연기 의뢰하고자 함

붙임 1. 전기공사 준공기한 연기요청 검토보고 [중랑감 제20-254(2020.05.26.)호] 1부.

2. 전기공사 관급자재 납품기한 연기요청 [중랑감 제20-255(2020.05.26.)호] 1부.

끝.