문서번호	시설관리과-9376
결재일자	2020.5.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
강판오	권승계	고신석		05/27 박영준
협 조

준공기한 연기 보고

(양평동4가 323~당산동5가 32-1번지외 3개소 송배수관정비공사)

2020. 5.

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

준공기한 연기 보고

『양평동4가 323 ~ 당산동5가 32-1번지외 3개소 송배수관정비공사』시행중 공기 부족으로 준공기한 연기 요청보고가 있어 검토내용을 보고드림.

□ 공사 현황

❍ 공 사 명 : 양평동4가323~당산동5가32-1번지외 3개소 송배수관정비공사

❍ 공사개요 : D=300~900mm, L=979m

❍ 공사기간 : 2019. 05. 20 ~ 2020. 5. 30

❍ 도 급 비 : 1,617,777,800원

❍ 시 공 자 : 태윤건설(주)  대표 권문상

❍ 감 독 자 : 서울시설관리공단(공사감독2처) 담당 김기용

❍ 준공기한 연기 검토보고서 제출 : 공사감독2처-7246(2020.05.25.)

□ 시설공단 감독 보고 내용

❍ 공정 현황

- 현 공정률 : 80%(2020.05.25. 기준)

- 완료 공정 : 관부설 D=300~400mm L=81m, D=900mm L=746m

- 잔여 공정

▸1-1구간 D=900mm, L=60m

▸1-2구간 D=900mm, L=165m(추가구간 63m포함)

❍ 준공기한 연기사유(지연일수 55일)

- 도로사업소 굴착복구 업체 미선정에 따른 절대공기 부족 일수 : 31일

- 2020.03.01부터 ~ 굴착복구 착공일(2020.04.01)까지 지연일수

- 우천 작업대기에 따른 절대공기 부족 : 11일 (기상청 자료 참조)

- 추가 작업 지시에 의한 절대공기 부족 일수 : 13일

▸D=900mm 밸브 설치 1개소 추가 :『시설관리과-6055(2020.04.02)』

▸D=900mm 63m 관부설 추가 :『시설관리과-9055(2020.05.22)』

❍ 준공기한 연기 요청일

- 당 초 : 2019.5.20.~ 2020. 5.30.

- 변 경 : 2019.5.20.~ 2020. 7.24.(55일 연장)

□ 검토(조치) 내용

❍ 동절기 굴착통제 이후 2020년 3월 1일부터 관부설 예정이었으나 도로사업소 굴착복구업체의 계약만료로 신규업체의 계약 및 착공일 까지  관부설이 지연되었고, 공사기간 중 우천 등으로 인한 작업대기로 절대공기가 약 42일 부족한 상황이며,

❍ 또한 공사수행 중 발생한 현장 실정사항으로 추가 작업구간이 발생됨에 따라 약 13일의 추가 작업일수가 요구되는 등 당초 준공일인 2020년 05월 30일 내 전 공종 완료 및 준공이 불가한 실정임.

❍ 도급사 요청사항인 “작업지연 및 추가 작업일수 등 55일 준공기한 연장”은 잔여공종을 완료키 위한 소요일수 검토 결과(첨부 참조)에 적정하기에 55일의 준공기한을 연기하여 준공 처리에 만전을 기하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

❍ 준공기한 연기내용

- 연기사유 : 작업지연, 추가작업 및 우천으로 인한 절대 공기 부족

- 준공기한 연기

구 분	공 사 기 간
당 초	2019.5.20. ~ 2019. 5.30.
변 경	2019.5.20. ~ 2020. 7.24.

- 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 제출 공문 1부.

2. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

3. 준공기한 연기원 승인 공문 및 연기원 각 1부.

4. 강서도로사업소 포장복구공사 계약서 및 관련공문 1부.  끝.