투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	계약변경 의뢰 (2020년 수경시설 유지보수 공사) (제1회 변경)

기성금 지급 등을 위하여 계약변경을 의뢰(요청)하니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 건        명: 2020년 수경시설 (10개 분수) 유지보수공사 (연간단가)

○ 계약상대자: ㈜세진조경 (대표이사:****)

○ 계 약 기 간: `20. 3.11. ~ `20.12.30.

○ 계 약 금 액: 462,901,100원

○ 계약변경내용: 총 계약금액 변경없이 공사물량 등 변경 (내역 변경)

<변경 전·후 계약내역>

비 목	당초 계약금액	변경 계액금액	증·감 금액
순공사비 (재료비+노무비+경비)	370,090,737	371,242,976	1,152,239
일반관리비	22,205,444	22,274,578	69,134
이윤	27,755,329	26,612,881	-1,142,448
폐기물처리비	767,672	688,747	-78,925
공사원가	420,819,182	420,819,182	0
부가세	42,081,918	42,081,918	0
총공사비	462,901,100	462,901,100	0

○예 산 과 목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원기전시설유지관리, 시설비 (100-401-01)

붙임  1. 방침서 (설계변경계획)  1부.

2. 변경계약내역서 및 계약금액조정 검증확인서 각 1부.  끝.

	기반시설과장
★주무관	윤정		기반시설과장	전결 05/25 라철흠
협조자
시행	기반시설과-1756	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0628	/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(5,6)