“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	관급자재(아스콘) 변경계약 요청(수유6배수지 건설공사)

1. 우리 부서에서 시행중인 『수유6배수지 건설공사』 관련 조달계약 되어 납품 중인  관급자재(아스콘)에 대하여 변경계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 관급자재 구매의뢰(아스콘)-수유6배수지 건설공사

1) 납품요구번호(계약번호) : 12-20-1-48274-00(12201006202)

2) 계 약 자 : ***********

3) 계약내역

규격	당초계약(㎥)	변경계약(㎥)	증․감(㎥)	비고
WC-2,가열3등급	40	26	△ 14
BB-2,가열3등급	60	52	△ 8

4) 계약금액                                                         (단위 : 원)

구분	당 초			변 경			증·감
	계	물품대	수수료	계	물품대	수수료	계	물품대	수수료
금액	5,598,060	5,568,000	30,060	4,313,680	4,290,520	23,160	△1,284,380	△1,277,480	△6,900

- 이월예산 : 금1,284,380원(물품대 : 금1,277,480원, 수수료 : 금6,900)

5) 변경사유 : 목적물 완성에 따른 관급자재 물량 변경

6) 예산과목 (사업코드 21106000)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비) : 물품대

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설부대비) : 수수료

붙 임 : 1. 관급자재 분할납품요구 및 통지서 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	박상권		시설과장	05/26 송병욱
협조자	주무관	이효원		예산팀장	홍경숙
시행	시설과-2055	(		)	접수		(		)
우	03731	서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 시설안전부 시설과	/
전화	02)3146-1497	/전송	02)3146-1529	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)