투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	"동물병원 외 1개소 수전설비 교체 및 정비공사 설계용역" 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 시설과-4120(2020.5.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 대공원에서 시행중인 “동물병원 외 1개소 수전설비 교체 및 정비공사 설계용역”에      대해 다음과 같이 준공기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

구 분	계 약 명	계약자	용역기간		비고
			변 경 전	변 경 후
설계용역	서울대공원 동물병원 외 1개소 수전설비 교체 및 정비공사 설계용역	***** **** ******	2020.4.21 ~ 2020.5.30	2020.4.21 ~ 2020.6.29	30일 연장

나. 준공기한 연기사유 : 추가과업 시행에 따른 과업기간 증가

다. 지체상금 부과대상: 미부과

라. 계약금액: 변경없음

붙임  1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	전성완		주무관	이춘한		시설과장	05/27 代이춘한
협조자	주무관	정한성
시행	시설과-4126	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02)500-7431	/전송	02)507-7230	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	부분공개(5)