문서번호	조경과-4156
결재일자	2020.5.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
이옥하	김강환	대결 05/27 오성문		전결
협 조
	전략기획실장		전진수
	총무과장		유연호

- 동물원 정문 및 광장 설계용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2020. 5.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 동물원 정문 및 광장 설계용역 -

준공기한 연기 검토 보고

시민 안전과 편의 개선을 위해 시행 중인  ‘동물원 정문 및 광장 설계용역’의 준공기한 연기에 대해 검토 보고합니다.

1		용역 개요

○ 용 역 명 : 서울대공원 동물원 정문 광장 마스터플랜 수립과 정문 및 부속시설 리모델링 설계용역

○ 용역기간 : 2019.12. 9. ~ 2020. 6. 5.

○ 계약금액 : **************

○ 용역업체 : 4개사 (분담이행)

************************************************

***************************************

○ 과업내용 : 동물원 정문 및 광장 개선에 관한 설계용역 1식

2		추진 경과

○ ’19.11.21.   설계공모 당선작 선정

○ ’19.12. 9.   용역 계약

○ ’19.12.24.   용역 착수보고 및 전문가 자문

○ ’20. 1.~3.   행정2부시장 보고(2회), 서울시총괄건축가(김승회) 자문, 총괄계획가(김용미 건축사) 위촉 및 자문, 기본설계 완료

○ ’20. 4.~5.   투자심사 완료, 개발제한구역(GB)관리계획변경 등 인허가 협의 및 신청, 건설기술심의(설계심의) 요청, 실시설계 진행

3		준공기한 연기검토 보고

□ 준공기한 연기 필요성

*******************************************************************************

□ 조치사항 검토 보고

******************

****************************************************

***********************************

4		향후 일정

○ 2020. 6. ~ 7.  설계심의 완료, 계약심사, 일상감사 등 사전 절차 이행

○ 2020. 7.        설계 준공 및 공사 발주