문서번호	건축부-8945
결재일자	2020.5.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
서경식		차무흥	05/27 임인구
협조
	주무관		김민희

『스페이스 살림 조성공사(3차)』

계약변경(공기연장) 검토보고

2020. 5.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『스페이스 살림 조성공사(3차)』

계약변경(공기연장) 검토보고

사업의뢰부서(여성정책담당관) 및 우리동네키움센터(2호) 추진부서(아이돌봄담당관) 공사변경 요청사항 이행 및 여성가족재단 연결브릿지 적정 시공일정 고려한 건설사업관리자의 ‘공기연장’ 실정보고가 있어, 이에 대한 검토 보고임

※ 총차 계약 : “기간변경 없음” / 3차 계약분: “2개월 연장”

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 동작구 대방동 340-4번지 외 3필지

○ 규    모 : 지하2층, 지상7층, 연면적 17,957㎡

○ 공사기간 : 2017.12.26. ~ 2020.09.25.

○ 시 공 자 : (주)호반건설 외 2개사

○ 감 리 자 : (주)희림종합건축사사무소 외 1개사

○ 건축공사비(도급액) : *********  / 공 정 율 : 81%

□ 추진경위

○ `15. 4. 7. : 스페이스 살림 조성계획(시장방침)

○ `16. 4. 4. : 국제설계공모 공고       /  `16. 6.30. : 당선작 발표

○ `16. 7.28.~`17.11.30. : 설계 용역 /  `17.10.31. : 공용건축물협의 완료

○ `17.12.26. : 착공                    /  `18. 9.30. : 공사 준공(1차)

○ `19. 7.15. : 공사 준공(2차)

□ 실정보고 내용

○ 보고 현황

-「준공기한 연장(3차수) 실정보고에 대한 적정성 검토보고」HTSC 2005-44호(2020. 5. 26.)

○ 관련 근거

- 공사계약 일반조건 제26조(계약기간의 연장)

- 산업안전보건법 제70조(건설공사의 기간의 연장)

○ 보고 사유

- ********************************

- ***************************************

- ***********************

□ 계약변경 내용

○ 공사 기간 변경

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
총 차	*********************************	*********************************	*****
3 차	********************************	********************************	*****

○ 공기 연장 사유

- *******************

· ************* [여성정책담당관-6285(2020.4.8.)]

· ***************** [여성정책담당관-8034(2020.5.21.)]

- ***************************

· **********************[아이돌봄담당관-7461(2020.5.22.)]

- ***********************[HTSC 2005-44호(2020.5.26.)]

· *****************************************

· **************************************

○ 귀책 사유 : ********

○ 지체상금 부과 : ***

○ 공사비 : ****************************************

□ 건설사업관리자 검토의견

○ *****************************************************

○ *************************************************************************************

□ 처리의견

○ ***************************************************************************************************

○ *************************************************************************************************

붙임  건설사업관리단 실정보고 검토의견서 1부.  끝.