“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	수유6배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역 설계변경 시행(총차분 2회, 2차분 1회)

1. 낙산및수유6배수(감리)제20-128호(2020. 5. 25.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진 중인 건설폐기물 처리용역에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 수유6배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역(장기계속)

2) 용역기간 : 총차분 2019. 4. 5. ~ 2020. 5. 30. (2차분 2020. 1. 1. ~ 2020. 5. 30.)

3) 계약금액 : 총차분 58,713,000원(2차분 7,950,000원)

4) 계 약 자 : ㈜성철환경개발 대표이사 김경옥

5) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비
[세부사업명 : 수유6배수지 건설공사(21106000)]

나. 설계변경 현황 및 사유

1) 계약금액

(가) 총차분

(단위: 원)

당 초	변 경	증 ․ 감
58,713,000	57,600,000	감) 1,113,000

(나) 2차분(2020년)

(단위: 원)

당 초	변 경	증 ․ 감
7,950,000	6,837,000	감) 1,113,000

2) 계약기간 : 변경없음

3) 변경사유 : 건설 폐기물 처리물량을 반영한 설계변경

붙임 : 1. 건설사업관리자 설계변경 검토 제출 공문 1부.
2. 설계변경 내역서 1부.
3. 설계변경 합의서 1부.
4. 폐기물 반출 현황(올바로 시스템) 1부.  끝.

주무관	박상권		시설과장	송병욱		시설관리부장	신용철		상수도사업본부부본부장	05/27 구아미
협조자	주무관	이효원		예산팀장	홍경숙		재무회계과장	代서미희
시행	시설과-2073	(		)	접수		(		)
우	03731	서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 시설안전부 시설과	/
전화	02)3146-1497	/전송	02)3146-1529	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)