투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	폐기물처리용역 설계변경 및 준공기한 변경(연기) 계약 의뢰(전체1회, 1차1회) [광나루한강공원 자연(형)호안 조성사업 건설폐기물처리용역]

우리 본부에서 추진중인 『광나루한강공원 자연(형)호안 조성사업 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(전체1회, 1차1회) 계약 및 준공기한 변경(연기) 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 광나루한강공원 자연(형)호안 조성사업 건설폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2019.11.04.~2020.12.28.(1차:2019.11.04.∼2020.06.30.)

다. 용역금액 : 182,457,000원(1차:154,845,000원)

라. 용역업체 : ㈜한강이앰피  대표 정승훈

마. 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 자연(형) 호안 복원, 시설비 및 부대비, 시설비

***********

*******

**	*******		******		**
	***	***	***	***
** **	***********	***********	***********	***********	***************** ******************
** **	******************	******************	******************	******************	********** **********

사. 설계변경 사유

- 시설공사의 공사완료기간이 단축됨에 따라 2차 계약 발주없이 1차 계약기간을 연장하여 폐기물처리용역 시행(전체 용역기간은 단축)

- 공사시 추가로 발생된 폐기물 물량 등 변경(조정)

붙임 : 1. 방침서  1부.

2. 설계변경 내역서(전체1회, 1차1회)  1부.

3. 준공기한 연기(변경) 의뢰서  1부.

4. 합의각서  1부. 끝.

							공원부장
주무관							박웅교			생태환경과장					이정환					공원부장					05/27 김인숙
협조자				주무관						김경화					기획예산과장							문영일					총무과장							이상이
시행			생태환경과-1695									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 5층															/
전화		02-2133-8287						/전송			02-2133-0740					/	pkyo2425@seoul.go.kr												/	부분공개(5)