문서번호	정수과-5897
결재일자	2020.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
조성연		유준수	05/27 이철범
협 조	정수시설과장			양영민
	주무관			서영호
	주무관			김응균
	주무관			김만규
	주무관			정진택

유해화학물질 취급시설

설치 및 정기검사 등 용역시행 계획(수정)

2020. 5.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

유해화학물질 취급시설

설치 및 정기검사 등 용역시행 계획(수정)

유해화학물질 취급시설 설치 및 관리기준이 2019. 9. 2. 개정됨에 따라

설치 및 정기검사시 개정된 「화학물질관리법」 시설기준에 적합하도록 도서

작성에 필요한 용역을 추진하고자 함

※ 정수과-3955호(20.3.31.) 관련임

Ⅰ		추진개요

추진배경

□ 종전의 「유해화학물질관리법」에 따라 정기검사를 받았으나 금년부터 개정,    강화된 「화학물질관리법」으로 검사

□ 사고대비물질(염소) 취급자는 위해관리계획서를 작성, 적합일(’17.3.3.)로

부터 4년이 경과한 날을 기준으로 3개월 이내 이행여부 점검

추진근거

□  「화학물질관리법」 제24조(취급시설 설치 및 정기검사 의무 이행)

- 유해화학물질 취급시설의 설치시 검사기관에서 설치검사 실시

- 연 1회 환경부령에 의한 검사기관에서 정기검사 실시

□  「화학물질관리법」 제41조의2(위해관리계획서 이행)

- 화학물질안전원 위해관리계획서 이행여부 정기점검 실시(1회/4년)

소요예산

□ 용역비 : 15,000천원 (부가세 별도)

- 예산과목 : 정수비, 수선유지교체비(수선유지비), 정수장유지관리

※ 유해화학물질 취급시설 설치 및 정기검사는 법적인 사항으로 원활한 검사수행

을  위하여 정수시설과 정수장유지관리(토목건축 시설물 유지관리) 예산 활용

Ⅱ		추진계획

용 역 명 : 유해화학물질 취급시설 설치,정기검사 도서작성 및 위해관리

계획서 이행점검(위험성평가 포함) 컨설팅 용역

용역기간 : 계약일 ~ 12월(설치 및 정기검사 적합통보시 까지)

용역대상

□ 암사아리수정수센터 유해화학물질 취급시설(배관 등 부대시설 포함)

【설치검사 대상】

공정명	위 치	시 설 용 량	용 도
가성소다 사용시설	1정수장 (실내)	10㎥ × 4기(NaOH 20%)	pH조절
	2정수장 (실외)	10㎥ × 1기(NaOH 희석조)

【정기검사 대상】

구분	시설명	시 설 용 량		용 도
1정수장	가성소다 (NaOH)	저장	200㎥×2기(가성소다50%)	pH조절
		사용	200㎥×4기(가성소다20%) 12㎥×1기(희석조)
	염소(사용)	78톤 *중화시설(가성소다 10㎥×1기) *취수장(전처리) 염소배관 연결		소 독
2정수장	가성소다 (NaOH)	저장	45㎥×1기(가성소다50%)	pH조절
		사용	45㎥×2기(가성소다20%) 4.5㎥×1기(가성소다20%)
	염소(사용)	32톤 *중화시설(가성소다 10㎥×1기)		소 독
통합	과산화수소	7.5톤 × 4기		산화제 / 잔류오존처리
취수장	염소(사용)	1정수장 염소사용시설 배관 연결		소 독

용역내용 (과업지시서 별첨)

□ 유해화학물질 취급시설 설치 및 정기검사 서면 심사자료 관련법규에

적합하게 작성

□ 유해화학물질 취급시설 설치 및 정기검사 지원

- 설치 및 정기검사시 기술 지원 및 수검 참여, 보완사항 발생 시 추가

자료작성

□ 위해관리계획서 이행점검 컨설팅(위험성평가 포함)

추진방법

□  계약방법 : 수의계약

- 용역 추정가격이 1,500만원 이하로, 1인견적 제출 수의계약 가능

- 2개이상 업체로부터 견적서를 제출받아 최저가를 제시한 업체와 계약 추진

Ⅲ		추진일정

□ 용역발주 방침 : 2020. 5.

□ 용역 발주 : 2020. 5.

□ 용역 시행 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

□ 설치 및 정기검사 완료 후 결과 제출(환경부) : 2020. 12.

Ⅳ		기대효과

□ 유해화학물질 취급시설의 적법한 검사를 통해 화학사고 예방 및 지속적인

사업장 안전관리로 지역주민과 환경보호

붙임  과업지시서  1부.  끝.