문서번호	시설보수과-1803
결재일자	2020.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
우배용	조선행	05/28 한성현

하수 슬러지 자체 처리시설 설치 사업 경과 보고

2020. 5.

서울특별시난지물재생센터

(시설보수과)

하수 슬러지 자체 처리 시설 설치 사업 경과 보고

난지물재생센터 운영효율 향상 및 슬러지 처리 자립화 실현을 위하여 추진중인 슬러지 자체 처리시설 설치 사업에 대한 추진 경과를 보고 드림.

1.		추진 근거

물재생센터 하수슬러지 자체 처리시설 설치계획

(물재생시설과-3370호, 2016.3.7.)

2.		사업 개요

사업명: 난지물재생센터 하수슬러지 건조시설 설치사업

위치: 난지물재생센터 기존 토양탈취상(대덕로 426)

처리 방식: 건조 연료화(함수율: 건조 전 75~85%⇒건조 후 8% 이하)

시설 용량: 처리용량 130톤/일(최대용량 143톤/일).

3.		추진 경과

하수슬러지 처리 자립화 대책(시장방침 제252호, 2015.9.20.)

물재생센터 4개소 자체처리시설 증설 900톤/일

물재생센터 하수슬러지 자체 처리시설 설치계획(물재생시설과-3370호, 2016.3.7.)

용량 및 비용

물재생센터	계	중랑	난지	탄천	서남
용량(톤/일)	900	370	160	120	250
비용(억원)	681	280	121	91	189

설계용역(기본설계 및 실시설계): 2016.5.~2017.5.

추진기간: 2017.6.~2018.12.

시행방법: 센터별 분리발주

난지, 서남물재생센터 슬러지 건조시설 설치 기본 및 실시설계 용역 발주(물재생시설과-6791호, 2016.05.12.)

슬러지건조시설 설치 사업 추진 통보(물재생시설과-11002, 2017.07.26.)

시설용량 산정

구분	중랑센터	서남센터	비고
당초(계획용량)	370톤/일	250톤/일
최종(실시설계)	350톤/일	285톤/일

총사업비 및 연도별 예산현황(안)

센터별	총사업비(천원)	2017년	2018년
중랑센터	30,382,100	12,255,000	18,127,100
서남센터	24,300,000	6,000,000	18,300,000

난지, 탄천슬러지 건조시설 설치사업 설계도서 송부(물재생시설과-18151, 2017.12.19.)

처리규모 및 사업비

구 분		당 초 (계획)	최 종 (설계)	증감	비 고
난지 센터	처리규모(톤/일)	160	130	△30	-계약심사완료
	시 설 비(억 원)	121	156	35
탄천 센터	처리규모(톤/일)	120	140	20	- 투자(재)심사완료 -계약심사완료
	시 설 비(억 원)	91	146	55

사업추진방법 : 상기대호 방침에 의함

1) 설계용역 : 서울시 물재생시설과 추진완료

2) 설치공사 : 센터별 자체발주(중랑, 서남 자체 추진 중)

2019년 예산서(물재생시설과)

관:(200)자본적지출, 항:(260)비가동설비자산취득, 세항:(261)건설중인자산, 목:(401) 시설비및부대비, 세목:(01)시설비 ○물재생시설 개선 •물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 20억원

2019년 공기업하수도사업특별회계 1차 추경 예산 확정 통보 (물재생계획과-9085, 2019.07.02.)

물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 감20억원.

붙임	1. 물재생센터 하수슬러지 자체 처리시설 설치계획(물재생시설과-3370호, 2016.3.7.) 1부.

2. 난지 슬러지처리시설 요약보고서(기본 및 실시설계) 1부.  끝.