문서번호	도시철도토목부-5548
결재일자	2020.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토목3과장	도시철도토목부장
엄태용	임병길	05/28 정대현

『진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업 1공구 건설공사』

휴일 작업계획계획 승인 검토 [’20년 6월]

2020. 6.

도시기반시설본부

도시철도토목부

『진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업 1공구 건설공사』

휴일 작업계획계획 승인 검토 [’20년 6월]

『진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업 1공구 건설공사』 관련 ’20년 6월 휴일 작업계획 승인 요청에 대하여 보고 드림

□ 휴일 작업계획

○ 근거 : 동명감 진접1 제2020-157호 (2020.05.27.)

○ 근무 사유

- 작업의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위해 휴일에도 지속적 공사추진으로 공정 만회

○ 근무계획

- 휴무일(토요일) : 3일 [6/13(토), 6/20(토), 6/27(토)]

→ 대체휴무 실시

- 휴  일(공휴일) : 5일 [6/6(현충일), 6/7(일), 6/14(일), 6/21(일), 6/28(일)]

→ 시공사 귀책으로 시공사에서 대가 지급

○ 세부내용

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
06월06일 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	권일순 부사장	김승태 팀장 최병준 대리 박진용 대리 윤수한 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 막장면 정리
06월07일 (일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	최광준 상무	최성윤 과장 박순민 대리 임상욱 대리
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 시험발파 준비(천공)
06월13일 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	장성일 이사	이육규 팀장 구현우 팀장 임상욱 대리
	- 작업구2 (환기구#2)	선진수평보링,B/P,폐수처리시설 설치 (가설 건축물 인허가 따라 일정 변경)

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단		시공사
06월14일 (일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설		권일순 부사장		심준수 팀장 박순민 대리 양원호 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	선진수평보링,B/P,폐수처리시설 설치 (가설 건축물 인허가 따라 일정 변경)
06월20일 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설		최광준 상무		구현우 팀장 최성윤 과장 이충헌 실장 임상욱 대리
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진
06월21일 (일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리,R/B시공 지보설치,S/C타설		장성일 이사		김승태 팀장 도화영 대리 양원호 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진 (양수허가에 따라 일정 변경 될 수 있음)
06월27일 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설		권일순 부사장		심준수 팀장 도화영 대리 박진용 대리 윤수한 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진
06월28일 (일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설		최광준 상무		이육규 팀장 최병준 대리 임상욱 대리
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진 (양수허가에 따라 일정 변경 될 수 있음)

□ 검토결과

○ 휴일근무 검토결과 : 적정

	관 련 근 거
□ 과업내용서 6.3.2. (1) 휴일 및 야간근무 - 원인제공자(귀책사유)가 명백한 경우는 원인제공자가 부담하는 것을 원칙으로 한다. □ 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(토시철도토목부-10681, ’13.11.14.) - 휴일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급 → 시공사 귀책은 시공사에서 대가지급

○ 개정된 근로기준법에 따른 주간 적정 근로시간(52시간) 준수 : 적정

□ 조치계획

○ 작업의 연속성과 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일 작업 승인조건을 부여하고 건설사업관리기술자 근무계획을 승인코자 함.

	승인조건
□ 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자 대가는 시공사에서 부담 □ 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것 □ 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사 관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것 □ 근로자 안전 10계명, 안전시공 10대 항목 준수 철저 □ 코로나19 예방 및 확산 방지를 위한 현장 안전관리 철저 ※ 코로나19 예방 및 확산 방지를 위한 사업장 대응지침 이행

붙임 : 휴일 작업계획 승인 요청 공문 1부.