문서번호	시설과-1879
결재일자	2020.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김민주	김석광	김재균	05/28 박미애
협 조

호현당 CCTV시스템 개선사업 추진계획

2020. 5.

중부공원녹지사업소

(시설과)

호현당 CCTV시스템 개선사업 추진계획

남산공원 호현당(회현자락)에 설치된 저화소 CCTV시스템을 개선하여 공원 내 범죄를 예방하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□  2020년 공원내 CCTV 개선사업 추진계획 알림[공원녹지정책과-1409(2020.1.22.)]

Ⅱ		시설현황

□ 위   치 :  남산공원 호현당(서울 중구 회현동1가 산1-44)
□ 설치연도 : 2011년 12월(내용연수 8년 경과)
□ 시설현황

❍ 52만 화소(아날로그 타입) CCTV카메라 9대 : 정상 운영 6대, 불량 3대
❍ 저장 및 표출 매체 DVR(SD급 40만화소) : 화면 식별 불가
❍ 영상정보 송출 매체 동축케이블 포설 : 아날로그 타입

영상 표출 화면	52만화소 회전형 카메라

Ⅲ		추진현황

□  2020. 1. 28. : 2020년 공원내 CCTV 개선사업 추진계획 통보(공원녹지정책과)

□  2020. 3.~ 4  : 현장조사 및 설계

□  2020. 5. 18. : 설계심의 요청 및 예산 재배정 요구

□  2020. 5. 22. : 예산 재배정 완료

Ⅳ		사업개요

□ 사 업 명 : 남산공원 호현당 CCTV시스템 개선사업
□ 사업개요 : 노후된 저화소 CCTV시스템 개선

❍ 200만 화소 고정형 카메라(광각 120。) 교체 및 설치 : 10대
- 9개소 1대, 1개소 2대(사각지대 방지)
❍ 저장·표출 매체 DVR을 NVR로 교체(저장용량 12TB, 30일이상 저장, 200만화소 표출)
❍ 영상정보 송출 매체 동축케이블을 광케이블로 교체(8C)
❍ 관로 굴착 및 복구

- 터파기 : 1,459m³
- 아스팔트 커팅 및 복구 : 96m²

□ 사업기간 : 조달물품(현장설치도) 계약체결일로부터 60일

□ ***************

□ 계약방법 : 나라장터 종합쇼핑몰 조달물품 계약

□ 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원                  유지관리 및 이용활성화, 공원내 CCTV 개선사업, 시설비                  (100-401-01)

□  하자담보 책임기간 : 2년(물품구매계약품질관리 특수조건 제18조)

Ⅴ		추진계획

□ 2020. 5. : 조달물품 계약의뢰
□ 2020. 6. : 계약체결 및 사업시행
□ 2020. 7. : 준공

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 사업심의자료 1부.  끝.