코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	2020년도 신호처 성과관리계획 변경 보고

1. 관련근거

가. 서울시 기술심사담당관-6336(2020.03.24.)「설계경제성(VE) 검토 일정 연기 알림」

나. 기획처-1390(2020.04.01.)「2020년도 성과관리계획 통보」

다. 신호처-2469(2020.05.22.)「『1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계용역』설계변경(계약기간 연장) 시행 보고」

2. 2020년도 신호처 성과관리계획 중 단위사업 1건에 대하여 다음과 같이 사업일정을 변경하여 추진하고자 합니다.

대상사업	변경사항	비고
1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축	◦ 사업일정: 설계용역 계약기간 연장 - 설계 경제성(VE) 심사 지연 (COVID-19 감염병 지역 확산 차단을 위한 고강도 사회적 거리두기 캠페인 동참) ※ 관련근거: 서울시 기술심사담당관-6336(2020.03.24.) 「설계경제성(VE) 검토 일정 연기 알림」

붙임: 2020년도 성과관리계획 변경 시행 1부.  끝.

과장		부장		처장		본부장	05/28
협조자
시행	신호처-2553	(	2020.05.28.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9786	/전송	0263114628	/	sdhyun@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사