문서번호	토목부-10392
결재일자	2020.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	05/28 김용제
협조

설계변경(전체34회,16차 1회) 검토보고 [강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사]

2020. 5.

도시기반시설본부

토 목 부

설계변경(전체34회,16차 1회) 검토보고

[강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사]

본 공사 건설사업관리단으로부터 실정보고를 반영한 시설공사 설계변경(전체34회, 16차 1회)요청이 있어 검토보고 드림.

□ 관련근거

○ 서영건설관리 2020-408(’20. 5. 28.) 설계변경(전체34회, 16차1회) 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

○ 규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

○ 계약금액 : 202,020백만 원(16차 8,540백만 원)

○ 공사기간 : ’01. 12. 29.~’20. 5. 31. (16차 ’20. 1. 14.~ 5. 31.)

○ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜ / ㈜서영엔지니어링

□ 설계변경 내용

가. 공사금액 및 공사기간

(단위 : 천원)

구 분		공사금액	증･감	공 사 기 간	비고
전 체	당초	202,020,000		2001. 12. 29. ~2020. 5. 31.
	변경	204,172,000	2,152,000	2001. 12. 29. ~2020. 5. 31.	준공기한 변경없음
16차 (1회)	당초	8,540,350		2020. 1. 14. ~2020. 5. 31.
	변경	10,692,350	2,152,000	2020. 1. 14. ~2020. 5. 31.	준공기한 변경없음

나. 주요 변경사항

공 종	당 초	변 경	증·감	비고
금하지하차도 개통에 따른 도로유지관리비	-	22,800	22,800	폐기물 등 처리
금하지하차도 시공물량 정산	805,900	832,200	26,300
공사기간 연장에 따른 관련 비목 변경	1,401,800	1,482,200	80,400
금하지하차도 교통안전시설물 설치	3,900	188,100	184,200
박미지하차도 종배수관 변경 시공 정산	432,900	432,200	-700
물가변동(16회) 반영	-	193,300	193,300
저소음 배수성 포장구간 택코팅 변경	769,000	778,100	9,100
부체도로 옹벽 및 경관재 구조물 변경	387,100	413,900	26,800
금하지하차도 방음터널 충격흡수시설 설치	-	242,200	242,200
진성연립 옹벽보수 및 펜스 설치	-	36,400	36,400
도로표지판 협의 결과 반영	731,300	776,500	45,200
개통구간 주요시설물 정밀안전점검 시행	-	143,000	143,000
금하지하차도 개통에 따른 교통 모니터링 시행	-	37,180	37,180
박미사랑공원 옹벽계단 설치	-	49,400	49,400
금하지하차도 개통에 따른 추가 시설물 설치	14,000	60,900	46,900
교량유지점검시설 추가 설치	-	187,600	187,600
금천구청 요청에 따른 금하마을 보도설치	115,200	212,700	97,500
교통안전시설물 추가설치	-	791,000	791,000	광명경찰서 요구
금하마을 방음벽 설치에 따른 조경 변경	292,900	318,900	26,000
배수관로 GIS DB구축 용역	-	48,290	48,290
준공대비 공용구간 도로유지관리비 반영	-	22,600	22,600
공용구간 도로시설물 보수	-	49,700	49,700
금하지하차도 구간 배수관터파기 토사소운반	174,700	150,700	-24,000
금하지하차도 교통처리복구계획 반영	-	48,200	48,200
시공물량(방음벽, 되메우기 등) 정산	10,524,100	10,567,600	43,500
제경비(보험료 외) 정산	686,807	595,937	-90,870
물가변동 정산	11,611,932	11,421,932	-190,000
합계	27,951,539	30,103,539	2,152,000

(단위:천원)

다. 공사비 증·감 현황

(단위: 백만원)

구 분	전 체			16차(1회)
	당초	변경	증･감	당초	변경	증･감
공통	7,858	8,096	238	473	712	239
토목	126,319	127,759	1,440	4,976	6,415	1,439
남북간 연결도로	3,877	3,943	66	11	77	66
한신아파트 보도육교공사	423	423	0	-	-	0
기아대교 철거 및 신설공사	6,306	6,306	0	-	-	0
직접공사비	144,783	146,527	1,744	5,460	7,204	1,744
제 경 비	38,872	39,084	212	2,304	2,516	212
공급가액	183,655	185,611	1,956	7,764	9,720	1,956
부가가치세	18,365	18,561	196	776	972	196
도 급 액	202,020	204,172	2,152	8,540	10,692	2,152

라. 건설사업관리단 검토의견

○ 본 공사의 설계변경(전체34회, 16차1회) 적정성 검토결과 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 건설사업관리단 검토의견과 같이 설계변경 내용이 적정하므로 계약상대자와 변경계약 체결하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서(전체, 16차1회)각 1부.  끝.