“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경(2차) 시행 및 계약 의뢰

우리사업소에서 시행하고 있는 『2019년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속공사)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차) 및 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2019년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속공사)

나. 공사개요: ┎ 밸브교체 및 변실정비 333개소(당초)

┖ 밸브교체 및 변실정비 149개소(변경)

다. 공사기간: 2019. 7. 1. ~ 2020. 6. 30.

라. 공사업체: ******************

마. 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총부기금액	***********	***********	*
금회(2차수) 부기금액	***********	***********	*

바. 설계변경 사유: 계약물량 증 ․ 감 및 신규공종발생

사. 예산과목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후밸브정비)

소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치및보수

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(올림터 · 배수지유지관리)

붙임: 1. 설계변경 심의 결과서 1부.

2. 설계변경 심위위원회 개최결과 보고 1부.

3. 설계변경내역서 및 합의서 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	이연창		시설안전팀장	박종덕		시설관리과장	05/28 변재홍
협조자
시행	시설관리과-9978	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 목동동로 155 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-3994	/전송	02-3146-4039	/	yeon6741@seoul.go.kr	/	부분공개(5)