문서번호	토목부-10355
결재일자	2020.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	05/28 김용제
협조

건설폐기물처리용역(전체10회, 10차1회) 설계변경 검토

(강남순환도시고속도로4공구 건설공사)

2020. 5.

도시기반시설본부

토 목 부

건설폐기물처리용역(전체10회, 10차1회) 설계변경 검토

[강남순환도시고속도로4공구 건설공사]

강남순환도시고속도로 4공구 준공에 따른 건설폐기물 수량 정산을 반영하여 설계 변경하고자 검토 보고 드림

※ 서영강남 20-152호(`20. 5. 26.) : 건설폐기물처리용역 변경설계서 제출

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 강남순환 도시고속도로(4공구)건설폐기물 처리용역

○ 용역기간 : ’10. 3. 8.~’20. 5. 31.(10차 `20. 1. 3.~`20. 5. 31.)

○ 도 급 액 : 2,260,900,000원(10차 366,260,000원)

○ 용 역 사 : 방태(주)

□ 보고내용

○ 계약금액 및 기간 변경

구 분		당 초	변 경	증·감
계약금액	전체	2,260,900,000원	2,044,350,000원	감) 216,550,000원
	10차	366,260,000원	149,710,000원	감) 216,550,000원
계약기간	전체	’10. 3. 8.~’20. 5. 31.	’10. 3. 8.~’20. 5. 31.	변경없음
	10차	’20. 1. 3.~’20. 5. 31.	’20. 1. 3.~’20. 5. 31.	변경없음

○ 설계변경사유

- 강남순환 4공구 준공에 따른 폐기물 정산 수량 반영

○ 변경내용

- 전체(10회)

공 종 명	단위	수 량			금 액
		당 초	변 경	증··감	당 초	변 경	증·감
Ⅰ.폐기물 처리비
폐콘크리트	ton	51,604	52,375	771	603,766,800	612,787,500	9,020,700
폐아스콘	ton	27,861	16,520	-11,341	351,058,680	204,750,756	-146,307,924
혼합폐기물	ton	9,298	9,290	-8	669,440,880	668,880,072	-560,808
금속및철재류	M/T	157	156	-1	-51,701,100	-51,480,000	221,100
소 계					1,572,565,260	1,434,938,328	-137,626,932
Ⅱ.폐기물 운반비
폐콘크리트	㎥	22,432	22,766	334	246,864,160	250,539,830	3,675,670
폐아스콘	㎥	11,853	6,914	-4,939	134,816,022	78,639,836	-56,176,186
혼합폐기물	㎥	14,757	14,744	-13	51,856,098	51,810,416	-45,682
소 계					433,536,280	380,990,082	-52,546,198
Ⅲ.스마트 송장 시스템			1식		3,116,121	2,154,399	-961,722
Ⅳ.일반관리비					21,676,814	19,049,504	-2,627,310
Ⅴ.이 윤					24,502,803	21,548,433	-2,954,370
공급가액					2,055,363,640	1,858,500,000	-196,863,640
부 가 세					205,536,360	185,850,000	-19,686,360
총용역비					2,260,900,000	2,044,350,000	-216,550,000

- 금회(10차)

공 종 명	단위	수 량			금 액
		당 초	변 경	증··감	당 초	변 경	증·감
Ⅰ.폐기물 처리비
폐콘크리트	ton	703	1,474	771	8,225,100	17,245,800	9,020,700
폐아스콘	ton	17,726	6,114	-11,612	223,344,324	77,036,400	-146,307,924
혼합폐기물	ton	7.79	-	-7.79	560,808	-	-560,808
금속및철재류	M/T	1.73	1.06	-0.67	-570,900	-349,800	221,100
소 계					231,559,332	93,932,400	-137,626,932
Ⅱ.폐기물 운반비
폐콘크리트	㎥	352	686	334	3,873,760	7,549,430	3,675,670
폐아스콘	㎥	7,544	2,605	-4,939	85,805,503	29,629,318	-56,176,185
혼합폐기물	㎥	13	-	-13	45,682	-	-45,682
소 계					89,724,945	37,178,748	-52,546,197
Ⅲ.스마트 송장 시스템			1식		2,047,753	1,086,030	-961,723
Ⅳ.일반관리비					4,486,252	1,858,942	-2,627,310
Ⅴ.이 윤					5,044,642	2,090,272	-2,954,370
공급가액					332,963,637	136,100,000	-196,863,637
부 가 세					33,296,363	13,610,000	-19,686,363
총용역비					366,260,000	149,710,000	-216,550,000

○ 감리단 검토의견

- 건설폐기물처리용역 변경설계서(전체10회, 10차)를 검토한 결과 적정하게 반영된 것으로 판단됨

□ 검토 의견

○ 본 공사 준공에 따른 건설폐기물 수량 정산 반영하여 설계변경하고자 하는 건설사업관리단 의견은 적정하므로 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 검토의견서 1부

2. 설계변경내역서(전체, 10차) 각 1부.  끝.