코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	공동체주택 지원허브 EHP(냉난방기) 지급자재 납품기한 연장 요청

1. 주택공급과-3477(‘20.3.17)호 관련입니다.

2. 공동체주택 지원허브 건축공사 일정에 맞추어 추진하기 위해 납품기한을 아래와 같이 변경요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

계약건명	계약번호	계약업체	계약기간		변경사유
			당 초	변 경
공동체주택 지원허브 냉난방기 조달구매	***********	**** ****	‘20. 3. 18 ~ ’20. 5. 17	‘20. 3. 18 ~ ’20. 8. 16	본 공사(건축)공사일정과 부합하기 위한 계약기간 변경

※ 본 사업은 SH공사에서 대행하고 있어 납품기한 조정 관련 공문 첨부

따로붙임 : 납품기한 조정요청 공문(SH공사) 1부.  끝.

	주택공급과장
주무관	도난주		주택공급총괄팀장	기태균		주택공급과장	05/29 이진형
협조자
시행	주택공급과-6440	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 14층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-6286	/전송	02-2133-0751	/	urbantj@seoul.go.kr	/	부분공개(4)