문서번호	급수운영과-9975
결재일자	2020.5.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강영탁	代서은교	05/29 代이문성
협 조

단 수 작 업 계 획 서

(쌍문동 281번지 일대_간선배관교체공사)

2020. 5.

북 부 수 도 사 업 소

급 수 운 영 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

단 수 작 업 계 획

(간선배관 부설공사)

□ 공사현황

- 공 사 명 : 창동 715-23~715-68외 2개소간 간선배관 공사

- 공사개요 : ******************************

- 시공회사 : **********************

□ 지역별 단수계획

작업구간	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
쌍문동	*************	*******************	09:00 ~ 17:00	50세대

□ 공사배관 상세도

배관상세도	위치도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	10분	**********************************
퇴 수	10분	*******************************
기존관절단	30분	***************************************
배관	300분	********************* *************************** **********************
용접(보강)
세척 및 통수	20분	*********************
합 계	6시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	타이튼직관	150	m	100
2	KP이음관	200	개	1
3	KP소켓곡관(B형)	150/45	개	4
4	플랜지관	150/650	개	1
5	KP소켓플랜지T형관(B형)	200/150	개	1
6	2F단관	150/500	개	1
7	제수변	150	개	1
9	이탈방지압륜	200	개	3
9	KP고무링	200	개	3
10	KP볼트	24×85	개	40

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	0.12W	대	2
2	관절단기	수동	대	2
3	양수기	50~100㎜	대	3

□ 인력확보계획

연번	구분	성명	자격	인원수	비고
계
1	용접공
2	배관공	*******	플랜트배관	2인
3	특별인부	*******	공업배관	2인
4	보통인부	*******	플랜트배관	2인

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획

******************************************

************

***************************************************

******************************

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	************************************ *********************************	********* *************
업 체	****************** ************** **************	*************

□ 시험굴착계획 : 해당없음

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

□ 기타사항

○ 단수일시 : 2020. 6. 01.(월) ~ 6. 05.(금)

○ 단수시간 : 09:00 ~ 17:00

○ 단수지역 : 도봉구 쌍문동 281~306번지 일대

○ 단수세대 : 50세대

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 조절대상 및 담당자

〇 단  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	**********	********	*	****	***
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
퇴수밸브	1	**********	********	*	****	***

〇통수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	**********	********	*	****	***
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
퇴수밸브	1	**********	********	*	****	***

밸브조절 위치도

단 수 작 업 계 획

(간선배관 부설공사)

□ 공사현황

- 공 사 명 : 창동 715-23~715-68외 2개소간 간선배관 공사

- 공사개요 : ******************************

- 시공회사 : **********************

□ 지역별 단수계획

작업구간	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
쌍문동	*************	*******************	09:00 ~ 17:00	50세대

□ 공사배관 상세도

배관상세도	위치도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	10분	**********************************
		**********************************
		**********************************
		**********************************
		*********************************
퇴 수	20분	*******************************
		*
기존관절단	20분	***************************************
배관	300분	********************* *************************** **********************
용접(보강)		**
세척 및 통수	20분	*********************
합 계	6시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	타이튼직관	150	m	100
2	KP이음관	200	개	1
3	KP소켓곡관(B형)	150/45	개	4
4	플랜지관	150/650	개	1
5	KP소켓플랜지T형관(B형)	200/150	개	1
6	2F단관	150/500	개	1
7	제수변	150	개	1
9	이탈방지압륜	200	개	3
9	KP고무링	200	개	3
10	KP볼트	24×85	개	40

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	0.12W	대	2
2	관절단기	수동	대	2
3	양수기	50~100㎜	대	3

□ 인력확보계획

연번	구분	성명	자격	인원수	비고
계
1	용접공
2	배관공	*******	*****	**
3	특별인부	*******	****	**
4	보통인부	*******	*****	**

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획

******************************************

************

***************************************************

******************************

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	************************************ *********************************	********* *************
업 체	****************** ************** **************	*************

□ 시험굴착계획 : 해당없음

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

□ 기타사항

○ 단수일시 : 2020. 6. 08.(월) ~ 2020. 6. 12.(금)

○ 단수시간 : 09:00 ~ 17:00

○ 단수지역 : 도봉구 쌍문동281 ~ 306 번지 일대

○ 단수세대 : 50세대

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 조절대상 및 담당자

〇단수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	**********	200(중간)	1	이상없음	김순기
	2	**********	80(분기)	1	이상없음	김순기
	3	**********	100(분기)	1	이상없음	김순기
	4	*********	200(분기)	1	이상없음	김순기
	5	*********	200(분기)	1	이상없음	김순기
	6	*********	80(분기)	1	이상없음	김순기
	7
	8
	9
퇴수밸브	1	**********	소화전 (신설)	1	이상없음	김순기

〇통수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	**********	200(중간)	1	이상없음	김순기
	2	**********	80(분기)	1	이상없음	김순기
	3	**********	100(분기)	1	이상없음	김순기
	4	*********	200(분기)	1	이상없음	김순기
	5	*********	200(분기)	1	이상없음	김순기
	6	*********	80(분기)	1	이상없음	김순기
	7
	8
	9
퇴수밸브	1	**********	소화전 (신설)	1	이상없음	김순기

밸브조절 위치도

단 수 작 업 계 획

(간선배관 부설공사)

□ 공사현황

- 공 사 명 : 창동 715-23~715-68외 2개소간 간선배관 공사

- 공사개요 : ****************************

- 시공회사 : (주)제이피건설사  현장대리인 심 재 승

□ 지역별 단수계획

작업구간	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
쌍문동	*************	***************	*************	****

□ 공사배관 상세도

배관상세도	위치도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	10분	*********************************
		*********************************
		*********************************
		*********************************
		********************************
퇴 수	10분	******************************
기존관절단	20분	**************************************
배관	300분	******************** ************************ *******************
용접(보강)
세척 및 통수	20분	*********************
합 계	6시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	타이튼직관	100	m	100
2	KP이음관	200	개	1
3	KP소켓곡관(B형)	100/45	개	4
4	플랜지관	100/650	개	1
5	KP소켓플랜지T형관(B형)	200/100	개	1
6	2F단관	100/500	개	1
7	제수변	100	개	1
9	이탈방지압륜	200	개	3
9	KP고무링	200	개	3
10	KP볼트	24×85	개	40

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	0.12W	대	2
2	관절단기	수동	대	2
3	양수기	50~100㎜	대	3

□ 인력확보계획

연번	구분	성명	자격	인원수	비고
계
1	용접공
2	배관공	*******	*****	**
3	특별인부	*******	****	**
4	보통인부	*******	*****	**

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획

******************************************

************

***************************************************

******************************

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	************************************ *********************************	********* *************
업 체	****************** ************** **************	*************

□ 시험굴착계획 : 해당없음

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

□ 기타사항

○ 단수일시 : 2020. 6. 15.(월) ~ 6. 19.(금)

○ 단수시간 : 09:00 ~ 17:00

○ 단수지역 : 도봉구 쌍문동 281 ~ 306번지일대

○ 단수세대 : 30세대

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 조절대상 및 담당자

〇단수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	**********	150(분기)	1	이상없음	김순기
	2	**********	80(분기)	1	이상없음	김순기
	3	**********	100(분기)	1	이상없음	김순기
	4	*********	200(분기)	1	이상없음	김순기
	5	*********	200(분기)	1	이상없음	김순기
	6	*********	80(분기)	1	이상없음	김순기
	7
	8
	9
퇴수밸브	1	**********	소화전 (신설)	1	이상없음	김순기

〇통수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	**********	150(분기)	1	이상없음	김순기
	2	**********	80(분기)	1	이상없음	김순기
	3	**********	100(분기)	1	이상없음	김순기
	4	*********	200(분기)	1	이상없음	김순기
	5	*********	200(분기)	1	이상없음	김순기
	6	*********	80(분기)	1	이상없음	김순기
	7
	8
	9
퇴수밸브	1	**********	소화전 (신설)	1	이상없음	김순기

밸브조절 위치도

붙 임 : 단수 홍보 안내문 6부.  끝.