문서번호	녹지관리과-2395
결재일자	2020.6.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
신경환		곽영만	06/01 김인숙
협 조

「반포지구 식재플랜터 보식‧정비 공사」

설계변경 검토보고

공  원  부

(녹지관리과)

「반포지구 식재플랜터 보식‧정비 공사」

설계변경 검토보고

우리부서에서 추진하는 「반포지구 식재플랜터 보식‧정비 공사」에 대하여 현장여건에 따른 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

Ⅰ		공사개요

공 사 명: 반포지구 식재플랜터 보식‧정비 공사

위    치: 반포한강공원

공사내용: 고사목 제거 및 수목 보식, 정비 등

공사기간: 2020. 5. 8. ~ 6. 6.

총공사비: ***********************

도급업체: *****************

Ⅱ		설계변경 내역

현장여건 변경내용

- 당초 제거로 잡혀있던 수목(느티나무) 1주가 봄철 생육을 다시 시작하여 제거보단 유지관리를 통한 생육 활성화

- 기존 사각벤치 재설치 2개 외에 주변 1개를 추가 이설하여 휴게공간 전체적 통일감 개선

세부 변경 내역

구분	최초계약 내역	변경 내역(금회)	공사비증감
합 계			********
철거 및 폐기물	******************* ******************	******************* ******************	*******
	*************************************** ********************************

구분	최초계약 내역	변경 내역(금회)		공사비증감
시설공	*******************	*******************		********
	*****************************************************************
식재공	*****************		*****************	-
	***************************
기타	*******************			********

예산변경 내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변경(금회)	증 감	비고
****		**********	**********	*******
***	****	**********	**********	*******
	*****	*********	*********	******
	*	**********	**********	*******

- 예산과목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 관리시설 관리 및 개선,

녹지시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		보고자 의견

위와 같이 현장여건에 맞도록 설계변경을 시행하여하여 불필요한 공정은 줄이고, 공간 통일감을 형성하여 더욱 쾌적한 공원 환경을 조성할 수 있도록 만전을 기하고자 함.

붙임   1. 설계변경내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.  끝.