문서번호	도로보수과-4879
결재일자	2020.6.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
황태선	이화신	06/01 고영준

『2020년 도로및교통부속물유지보수공사(연간단가)』 작업지시(1차)완료 보고

2020. 6.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(1차) 완료 보고

우리사업소에서 시행중인 「2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)」와 관련 1차 작업지시가 완료되어 이에 검토 보고 드림

▢ 사업개요

∘ 공 사 명: 2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)

∘ 공사개요

- 도로및교통부속물 세척 : 11,000㎡

- 과속방지턱 도색       : 1000㎡

- 도로표지병 설치       : 1,260개

∘ 총공사비: *********

- 도급비: *********

- 관급비: ********

- 이전비: ********

∘ 도 급 자: **************

▢ 1차 작업완료 내용

∘ 작업기간: 2020. 04. 13. ~ 05. 27.

∘ 작업구간: 광운로 외 16개 노선(107개소)

공종	정비물량(㎡)		증·감
	작업지시	작업완료
과속방지턱 도색	3,207	3,444	증 237

연번	노선	위치	공 종	정비물량(㎡)		증·감
				당초	변경
1	광운로	광운로95 등 8개소	과속방지턱 도색	230.4	209.52	감) 20.88
2	노해로	숭미초등학교 앞	″	43.2	57.6	증) 14.40
3	대사관로	대사관로50 등 9개소	″	226.8	235.44	증) 8.64
4	덕릉로	덕릉로 동막꽃단지 앞	″	10.8	40.32	증) 29.52
5	방학로	방학로306	″	25.2	25.56	증) 0.36
6	북악산로	부암동82-10 등 37개소	″	944.64	962.28	증) 17.64
7	삼양로	삼양로73 등 3개소	″	135.72	135	감) 0.72
8	삼청로	삼청터널 앞 등 2개소	″	43.2	50.4	증) 7.2
9	상계로	상계로262 등 7개소	″	169.2	136.44	감) 32.76
10	솔샘로	솔샘로167 등 3개소	″	177.12	178.2	증) 1.08
11	시루봉로	시루봉로56 등 4개소	″	82.44	139.32	증) 56.88
12	오현로	오현로14-1 등 9개소	″	318.96	334.08	증) 15.12
13	월곡로	월곡로2 등 2개소	″	54	58.68	증) 4.68
14	인수봉로	인수봉로46 등 9개소	″	323.28	322.56	감) 0.72
15	지봉로	지봉로58 등 4개소	″	206.28	254.52	증) 48.24
16	창의문로	창의문로31 등 5개소	″	151.2	238.32	증) 87.12
17	한천로66길	석관동113-1 등 2개소	″	65.16	65.88	증) 0.72
계				3,207	3,444	증) 237

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구분	계약금액	1차 작업완료	잔 액	비 고
도급비	301,848	137,060	164,788
관급비	72,930	-	72,930
이전비	24,000	3,344	20,656	충격흡수시설 보수
합계	398,778	140,404	258,374

▢ 조치계획

∘ 『2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)』에 시공물량을 반영하여 실정산하고자 함.

붙임  1. 공사완료사진(별도보고) 1부.

2. 작업완료보고서 1부.

3. 휘도측정 결과 1부.  끝.