“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	어르신복지과-12459		★주무관	어르신지원팀장		어르신복지과장		복지생활국장		부구청장
			김준영	김길주		배근희		이광우		전결 06/01 하철승
등록일자	2020.5.29.
결재일자	2020.6.1.
공개구분	부분공개(5)
			협조자
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

- 안전하고 쾌적한 경로당 관리를 위한 -

대청경로당 안전점검 시설 개보수 공사

□ 공사명: 대청경로당 안전점검 시설 개보수 공사
□ 위  치: 서울특별시 강남구 일원동 621(개포로124길 24)
□ 추진기간 : 2020. 6. 1.~7. 3.(휴관기간에 조속히 실시)
□ 주요 공사내용 : 동절기 안전점검 지적사항 및 경로당 요구사항 보수

❍ 지붕누수 보수(아케이드 지붕 누수, 물받이청소 및 신설, 물홈통 교체)

❍ 화장실 개선(노후 소변기 교체)

❍ 전등 및 스위치 설치(어두운 출입구 LED 천장등)

❍ 도배 및 단열공사(방염벽지 도배 및 내벽 단열) 등

□ 소요예산 : *********

❍ 공사비 : *********/수의계약(소액)

2020.  5.   .

	강 남 구
(		어르신복지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 사회복지사업법 제34조4(시설의 안전점검 등) • 재난 및 안전관리 기본법 제30조(재난예방을 위한 긴급안전점검 등)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 어르신복지과-542(2020. 1. 7.)호 「2020년 노인복지시설 개·보수 공사 추진계획」
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상: 경로당 이용 어르신, 주민 등
분 야 별 검토사항 [계속 : o ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ㅇ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진 상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ㅇ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 안전하고 쾌적한 경로당 관리를 위한 -

대청경로당 동절기 안전점검 결과 지적사항 및 경로당 어르신들의 노후시설 보수 요청사항인 지붕누수 보수, 화장실 개선, 출입구 전등 설치, 도배 및 단열 공사 등의 시설 보수 공사를 경로당 휴관 기간에 신속히 실시하여 안전하고 쾌적한 경로당 관리에 만전을 기하고자 함.

대청경로당 안전점검 시설 개보수 공사

Ⅰ		추 진 근 거

□ 사회복지사업법 제34조4(시설의 안전점검 등)

□ 재난 및 안전관리 기본법 제30조(재난예방을 위한 긴급안전점검 등)

□ 2019년 동절기 노인복지시설 안전점검 결과(어르신복지과-31175호, 2019. 12. 23.)

□ 2020년 노인복지시설 개·보수 공사 추진계획(어르신복지과-542호, 2020. 1. 7.)

Ⅱ		시설현황

□ 대청경로당

규 모	지상1층
연 면 적	126㎡
준공일자	1989. 6. 30.
구 조	철근콘크리트조
이용인원	69명

Ⅲ		공사개요

□ 공사명: 대청경로당 안전점검 사항 개보수 공사

□ 위   치 : 서울특별시 강남구 일원동 621(개포로124길 24)

□ 기   간 : 2020. 6. 4.~7. 3.(착공일로부터 30일)

□ 공사내용

❍ 지붕누수 보수(아케이드 지붕 누수보수, 물받이청소 및 신설, 물홈통교체)

❍ 화장실 개선(노후 소변기 교체-악취개선 등)

❍ 전등 및 스위치설치(어두운 경로당 출입구 앞 LED 천정등 설치)

❍ 도배 및 단열공사(노후된 벽지 방염벽지 도배 및 내벽 단열시설)

Ⅳ		세부추진계획

□ 발주계획공개(제안서 접수) 및 계약 : 2020. 6. 1.~6. 3.

□ 공사시행

❍ 기    간 : 2020. 6. 4.~7. 3.(착공일로부터 30일)

❍ 계약방법 : 수의계약(소액)

❍ 계약근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

❍ 업체선정 : 변경된 수의계약절차에 따라 우리 구 수의계약시스템에 발주계획 공개 후 제안서를 접수한 업체 선정

❍ 선정기준 : 추정가격이 2,000만원 이하 소액공사로, 전문건설업인 “시설유지관리면허”가 있는 우수한 전문건설업체와 계약을 체결하여 안전점검 지적사항 및 개‧보수 요구사항을 신속히 해결하고자 함.

□ 공사 세부내역

위 치	공사내용	현장사진
지붕	❍ 지붕누수 보수 - 물받이 신설공사 - 아케이드 지붕 누수 보수 - 물받이 낙엽 적치물 등 청소 - 노후 물홈통 교체
현관	❍ 전등 및 스위치설치 - 어두운 경로당 출입구 앞 상부 LED 천장등 설치
건물 내부	❍ 화장실 개선공사 - 소변기 2개 교체(봉수내장형) - 악취 개선(냄새역류방지)
	❍ 도배 및 단열 공사 - 노후된 할아버지, 할머니방, 거실의 벽지 실크방염벽지로 교체(도배) - 겨울철 냉기차단 등 내벽 단열 공사(할머니방, 창문하부)

Ⅴ		소요예산

□ 공사비 : *********

구 분	금 액
공 사 비	**************************
공급가액	************************
부가가치세	***********************

□ 예산과목 : 어르신복지과, 노인복지증진, 노인복지시설 운영 및 지원, 노인복지시설 유지 관리, 시설비및부대비(401), 시설비(01)

Ⅵ		행정사항

□ 발주계획 수립·공사발주 및 감독------------------어르신복지과

□ 공사내용 사전 경로당 홍보 및 협조 ------------------ 일원1동

□ 재정합의 및 계약 체결 ----------------------------- 재무과

붙임  1. 산출내역서 1부.
2. 시방서 1부.  끝.