문서번호	도시철도토목부-5695
결재일자	2020.6.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정병구		임병길	06/02 정대현
협 조

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』

사급자재(시멘트) 설계 누락분 반영 실정보고

2020. 6.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』

사급자재(시멘트) 설계 누락분 반영 실정보고

당초 설계에서 시멘트 자재수량 집계표 작성 시 시공량 집계표 Date(강관다단Grouting, Free-Grouting)가 누락되어 시멘트 자재량(포대 및 Bulk) 산출오류가 발생, 설계 누락분 반영을 위한 실정보고 건을 검토보고 함.

※ 관련문서 : 동명감 진접1 제2020-149호(2020.5.20.) “진접1공구 터널 시멘트 설계수량 오류 실정보고”

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

❍ 규    모 : 총연장 5,669m(입출고선 5,556m, 차량기지 113m)

- 단선(상,하행) 1,459m, 복선 4,097m, 환기구 2개소

❍ 계약기간 : 2018.12.31. ~ 2024.10.29

❍ 총사업비 : 90,948백만원 (1차공사 4,000백만원)

❍ 시공사/감리사 : ㈜KCC건설/ ㈜동명기술공단외 4개소

2		추 진 경 위

❍ ‘20. 5.18 : 터널공사 시멘트 수량산출 오류건에 대한 원설계자 검토의견서 접수

*****************

· 소규모 강관다단그라우팅, 프리그라우팅 시멘트 자재수량

→ 원설계 시 수량산출서에서 수량을 삭제하고 단가산출서에 반영하는 과정에서 누락발생

· 숏크리트 시멘트 자재수량

→ 원설계 시 총괄집계표 과정에서 오류 발생

3		보 고 내 용

1. 사급자재(시멘트) 터널구간 설계 누락분 반영

❍ 미반영 사유 : 당초 원설계에서 시멘트 자재수량 집계표 작성 시 시공량 집계표 Date가 누락되어 시멘트 자재수량(포대 및 Bulk) 산출오류 발생으로 누락

❍ 시멘트 자재수량 집계표 작성 시 누락된 시공량 집계표 Date

▸ 단선 및 복선터널, 경사갱 : 소규모 강관다단-Grouting(터널 천단지지 목적) 2,452공

Free-Grouting(배수차단 목적) 1,152공

▸ 복선터널(직선)           : Shot-Crete(다단발파 구간) 1,854㎥

❍ 누락 시멘트 자재수량 산출

누락 시공량 Date		포대 (40kg/포)	Bulk(트럭)
공 종	누락 시공량
소규모 강관다단-Grouting (천공경 125mm)	▸단선터널 1,276공 ▸복선터널 1,092공 ▸경 사 갱 84공	▸1,276공×327.75kg/공×1.02(할증) ▸1,092공×327.75kg/공×1.02(할증) ▸84공×327.75kg/공×1.03(할증) 소계 819,987kg 계산식 819,987kg÷40kg/포=20,500포	-
	소계 2,452공	소계 20,500포
Free-Grouting (천공경 45mm)	▸단선터널 264공 ▸복선터널 816공 ▸경 사 갱 72공	▸264공×450kg/공×1.02(할증) ▸816공×450kg/공×1.02(할증) ▸72공×450kg/공×1.03(할증) 소계 529,092kg 계산식 529,092kg÷40kg/포=13,227포	-
	소계 1.152공	소계 13,227포
Shot-Crete (t=80∼300mm)	▸복선터널 1,853.83㎥ (다단발파 구간)	-	1,853.83㎥×441kg/㎥×1.02(할증)÷1,000 =834톤
			소계 834톤
계		33,727포	834톤

4		건설사업관리단 검토의견

❍ 터널공사  시행을 위한 주요자재인 시멘트(포대, 벌크) 수량산출에 대하여 물량집계표 작성 시 착오설계가 발생함.

▸ 소규모 강관다단-Grouting용 시멘트(40kg) : 20,500포

▸ Free-Grouting용 시멘트(40kg)            : 13,227포

소 계                                    : 33,727포(포대 用)

▸ Shot-Crete용 시멘트 : 834톤(벌크 用)

※ 록볼트, 포아폴링, 배면그라우팅용 시멘트는 수량산출 및 적용 적정함(포대 3,493포, Bulk 6,820톤)

❍ 수량 누락분에  대한 추가반영이 적절하다고 판단되며, 추후 변경수량에 대하여 설계변경시 협의 후 정산 반영함이 타당함.

▸ 공사비 검토

구분		규 격	단위	공사비 변경 내역			비 고
				당 초	변 경	증 · 감
사급자재 (시멘트)	포대	40kg	포	3,493	37,220	증) 33,727
	Bulk		톤	6,820	7,654	증) 834
자재금액				688,900천원	922,100천원	증) 233,200천원

5		원설계자 의견

❍ 설계시 시멘트 자재 집계표 작성 후 일부 물량 내역서 적용 누락시킴.

❍ 설계시 시멘트 자재 총괄집계표 작성 과정에서 수량반영 착오 발생하였음.

6		조치계획

❍ 당초 원설계에서 시멘트 자재수량 집계표 작성 시 시공량 집계표 Date(강관다단Grouting, Free-Grouting )가 누락되어 시멘트 자재량(포대 및 Bulk) 산출오류가 발생한 사항은 원설계자 검토의견에 따라 사전에 검토됨에 따라서,

❍ 시멘트 자재수량 설계 누락분 반영을 위한 실정보고 건은 건설사업관리단 검토의견과 같이 원안대로 승인 조치하고, 추후 설계 변경시 정산 반영코자 함.

붙임 : 1) 건설사업관리단 실정보고 1부.

2) 관련 서류 각 1부.  끝.