“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약(2019년 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물-3회) 수정요청

우리사업소에서 시행중인 『2019년 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속 단가계약)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회 최종) 계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2019년 동작 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속 단가계약)

나. 계 약 자 : ****************************

다. 계약기간 : 2020.01.01.〜 2020.05.31.(총 계약기간 : 2019.05.23.~ 2020.05.31.)

라. 설계변경 사유 : 신규공종 및 계약물량 증․감 발생

마. 설계변경 내역

구 분	당초 계약금액(최초)	변경 계약금액	증ㆍ감
공급가액	************	************	************
부가가치세	***********	***********	************
도 급 액	************	************	************

바. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

- 소방재난 능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수, 시설비

사. 최대이행금액 : 600,000천원

붙 임 : 1. 설계변경 시행(품의) 1부.

2. 설계변경 심의위원회 개최 결과 보고 1부.

3. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

4. 설계변경 내역서 1부.

5. 변경합의서 및 제비율 검증 확인서 각 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	오영진		시설안전팀장	代오영진		시설관리과장	05/29 고신석
협조자
시행	시설관리과-9595	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/
전화	02-3146-4599	/전송	02-3146-4639	/	oyj6802@seoul.go.kr	/	부분공개(7)