문서번호	시설관리과-12786
결재일자	2020.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설운영팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
윤혜정	박종일	천성훈	05/29 이재호
협 조

준공기한 연기(2차) 계획 보고

(동대문구,중랑구 관내 상수도공사 교통소통대책 수립용역)

2020. 5.

동부수도사업소

동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 교통소통대책 수립용역

준공기한 연기(2차) 계획 보고

우리 사업소에서 시행중인 「동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 교통소통대책 수립용역」과 관련하여 준공기한 연기(2차) 계획을 보고 드림.

1		용 역 현 황

▢ 용 역 명: 동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 교통소통대책 수립용역

▢ 용역개요: 상수관로 매설공사 교통소통대책 수립

(D=150~500㎜, L=3,375m)

▢ 용역기간: 2020. 3. 9. ~ 2020. 4. 7.

❍ 준공기한 1차 연기

당초: 2020. 3. 9. ~ 2020. 4.  7.

변경: 2020. 3. 9. ~ 2020. 5. 29.

▢ 계약금액: 53,654,340원

▢ 수 급 자: *****************

2		보 고 내 용

▢ 교통소통대책 수립용역 준공기한 연기(2차)

❍ 1차 연기된 용역 완료기한이 2020.5. 29.이나, 서울시 교통소통 자문위원회 개최 일정이 6월 중순으로 예정되어 있는바, 용역기간 연장이 불가피한 실정임

❍	본 용역은 발주 시 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 개최 일정을 고려하여 입찰공고문에 교통소통자문위원회 통과시까지 용역기간을 연장할 수 있다는 단서가 포함되어 있음

❍ 추진 경과 및 향후 일정

- 2020. 3. 5. 계약체결

- 2020. 3. 9. 용역착수

2020. 3. 9. ~ 2020. 5. 29. 현재 교통소통대책 수립 추진현황

구분	서울시	동대문구	중랑구
심의(협의) 요청 (보고서 제출)	5. 14.	5. 28.	보고서 제출 예정
심의(협의) 개최	6월 중순 예정	협의의견 서면 통보 예정	-

※ 코로나19 사태에 따라 서울시 자문회의 개최 일정 지연

- 2020. 7. 31. 성과품 제출 및 준공(예정)

3		검 토 의 견

▢ 용역 준공기한을 서울시 및 자치구(동대문구, 중랑구) 교통소통 심의위원회 통과시까지 연기하여 동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 교통소통대책 수립 용역에 만전을 기하고자 합니다.

❍ 당초: 2020. 3. 9. ~ 2020. 5. 29.(1차 준공기한 연기)

❍ 변경: 2020. 3. 9. ~ 2020. 7. 31.

붙임  준공기한 변경 연기원 및 합의서 1부.  끝.