문서번호	공공재생과-5887
결재일자	2020.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공재생정책팀장	공공재생과장
윤지선		신명승	05/29 이동일
협조

서울로7017~구서울역사 연결통로 설치 및 리모델링 설계 등 용역 기간 연장 검토 보고

2020. 5.

공공재생과

[서계2길]청파언덕길 조성 설계용역 계약 변경 검토 보고

서울로2단계 연결길 조성사업 중 서계2길 청파언덕길 조성 설계용역 관련하여 기간 연장에 대해 아래와 같이 변경하고자 함.

Ⅰ		개요

□ 용 역 명 : [서계2길] 청파언덕길 구간 환경개선 설계용역

□ 용역기간 : ‘19.12.10 ~ ’20.6.8(6개월)

□ 계약금액 : 43,260천원

□ 계 약 자 : 인시추 대표 장유진

□ 과업내용

○ 서울로2단계 연결길 중 서계2길 현황조사, 기본 및 실시설계

- 토목설계 : 계단1개소 정비, 도로포장 재정비 등

- 전기설계 : 경관조명, 보안등, CCTV 설치 등

- 조경설계 : 골목화단 조성, 담장녹화 등

- 공공디자인 : 마을 환경개선(입면 및 통일감 있는 악세서리 반영)

커뮤니티 공유공간 및 휴게시설 설치

Ⅱ		추진경위

○ `19.11.14  : 용역시행 방침

○ `19.11.22  : 수의계약의뢰(공공재생과 → 재무과)

○ `20.04.20 : 설계관련 실무회의 개최[공공재생과-4704(‘20.4.23)]

- 청파데크 설치를 위한 안전진단 및 추후 설계변경 진행

○ `19.12.10  : 계약 체결 및 용역 착수

Ⅲ		계약 변경 내용

□ 변경내용

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
과업기간	`19.12.10 ~ `20.6.8 (6개월)	‘19.12.10 ~ ’20.9.8 (9개월)	용역기간 3개월 증가
계약금액	43,260천원	43,260천원	변동없음

□ 변경사유

○ 코로나19로 인해 주민협의가 지연되었고, 청파언덕데크 설치를 위한 옹벽 사면 안전진단을 위해 용역기간을 연장하고자 함.

※ 안전진단 비용에 대한 용역비는 현장 점검 및 자문 후 설계변경 예정

< 청파언덕 전망데크 조감도 >	< 옹벽 사면 현장 사진 >

□ 귀책사유

○ 서울특별시

□ 지체상금 부과여부

○ 미부과

Ⅳ		향후계획

○ ‘20. 5월 말 : 계약변경 의뢰(공공재생과 → 재무과)

○ ‘20. 6월 초 : 안전진단 여부 관련 현장 점검 및 자문 예정

○ ‘20. 9월 초 : 용역 준공.  끝.