문서번호	전시기획과-3427
결재일자	2020.6.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전시기획과장	서울공예박물관장
임하연		채영	06/01 김정화
협조

공예작품설치 지명공모 실무용역 월간 보고[5월]

2020. 6.

서울공예박물관

(전시기획과)

공예작품설치 지명공모

실무용역 월간 보고[5월]

서울공예박물관 공예작품설치를 위한 실무용역을 수행하고 2020년 5월 추진 현황을 아래와 같이 보고함

□ 추진근거 및 경과

❍ 서울공예박물관 공예인테리어 조성계획 (전시기획과-9,’18.11.26)

❍ 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 추진계획 (전시기획과-3487,’19.8.30)

❍ 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 실무용역 시행(변경) (전시기획과-5856,’19.12.16)

❍ 공예작품설치 지명공모 실무용역 착수보고회 결과보고 (전시기획과-6095,’19.12.23)

❍ 공예작품설치 지명공모 선정작가 워크숍 결과보고 (전시기획과-1390, ’20.2.26)

❍ 공예작품설치 지명공모 실무용역 월간보고(’19.12~’20.4)

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 실무용역

❍ 사업기간 : 2019.12.~2020.12.

❍ 소요예산 : *********

❍ 용 역 사 : ******

❍ 주요 과업 내용

-공예작품설치 지명공모 기획‧운영 총괄

-공모진행 및 작품제작 과정기록

-작품운송‧설치 지원

-작품 유지보수 및 관리안전 매뉴얼 작성

-공모 관련 자료전시회 기획 및 설치, 운영

-기타 사업추진 전반에 관한 사항

□ 추진현황

일 시	2020. 5. 8.(금)
장 소	건립현장_ 윤보선길(작품설치 조망위치)
참 석 자	‧ 실무용역 : ***, 건축감리, 건축시공사 ‧ 서울공예박물관 : 박물관장, 담당주무관2 ‧ 지명공모 선정작가 : ****작가, 설치팀
진행내용	작품제작 일정 및 설치 일정협의 건축구조에 따른 설치 방안 협의, 사이니지와 함께 설치되는 부분은 사이니지 팀과의 사전협의 필요성 확인 향후 사이니지팀과의 미팅 일정 협의(설치방안, 재질 등)

❍ ***작가 작품설치 현장협의

❍

일 시	2020. 5. 11.(월)
장 소	서울공예박물관 관장실
참 석 자	‧ 실무용역 : ********(영상)****(사진) ‧ 지명공모 선정작가 : ******
진행내용	물레성형 작업 및 면치기 작업 기록

***작가 2차 촬영

❍ ***작가 3차 촬영

일 시	2020. 5. 13.(수)
장 소	선정작가 작업실(서울시 종로)
참 석 자	‧ 실무용역 : ***(인터뷰어), ***(PM),***** ***(영상),***(사진) ‧ 지명공모 선정작가 : ****작가
진행내용	추가인터뷰진행 성형작업 마무리단계, 면치기작업 내부구조 및 도색작업 기록

❍

일 시	2020. 5. 13.(수)
장 소	북촌 카페
참 석 자	‧ 실무용역 : *************(영상),***순
진행내용	1차 가편집 리뷰 추가 기록콘텐츠 제안 및 확정 자막 추가 작업

영상 가편집 회의

❍ 소식지 제작 편집회의

일 시	2020. 5. 19.(화)
장 소	실무용역사 회의실
참 석 자	‧ 실무용역 : *************(디자이너),****
진행내용	소식지 기획방향 및 목적 공유 수록콘텐츠 협의 디자인컨셉 협의

❍ ***작가 1차 촬영

일 시	2020. 5. 22.(금)
장 소	선정작가 작업실(겅기도 이천)
참 석 자	‧ 실무용역 ：****인터뷰어),****(영상), ***(사진), ***** ******** ‧ 지명공모 선정작가 : *** 작가
진행내용	인터뷰 진행 유리성형과정 기록 도구 기록팀과 작품설치팀의 긴밀한 협의로 설치방법 모색키로 함 조명 요청 사항 전달(간접조명 요청_작가)

❍ ***작가 사이니지팀 설치협의

일 시	2020. 5. 25.(월)
장 소	현장회의실
참 석 자	‧ 서울공예박물관 : 전시기획과장, 담당주무관2 ‧ 실무용역 : *****사이니지팀2 ‧ 지명공모 선정작가 : ***작가, 작가작품설치팀
진행내용	작가 작품 설치 방안 및 사이니지 설치 방안 협의 작품의 모듈크기에 따라 사이니지 크기 조정협의 샘플시안 제작하여 작가 작업실에서 최종 사이즈 및 설치 방법 확정 하는 것으로 협의

❍ ***작가 2차 영상촬영

일 시	2020. 5. 28.(목)
장 소	선정작가 작업실(경기도 구리시)
참 석 자	‧ 실무용역 : ************
진행내용	8도 돌의자 가공작업 영상기록

❍ 소식지 1차 디자인회의

일 시	2020. 5. 29.(금)
장 소	***** 회의실
참 석 자	‧실무용역 : ************************
진행내용	디자인시안 수정사항 협의, 추가 콘텐츠 협의 사진 선별시 작가 작업 단계를 이해할 수 있는 사진 위주로 선별 진행 박물관소개 및 공모개요 원고 박물관요청

□ 추진실적

추진실적	추진기간	단계	비중	달성율
용역공정관리 ‧ 착수보고회 ‧ 중간보고회 ‧ 최종보고회	‘19.12.~’20.12	실행	6%	38%
공예작품설치 기본계획 전략수립‧환경 분석 ‧ 기본계획수립, 설치공간 분석‧인테리어 협의	’19.12.~’20.3	실행	14%	85%
과업이행 : 기록 ‧ 자문회의, 작가워크숍, 보고회 진행 기록 ‧ 공예작가 작품 제작과정, 완료 기록 ‧ 공예작가 인터뷰 영상기획, 촬영 및 편집	’20.1.~’20.10.	실행	35%	30%
과업이행 : 전시 ‧ 작가작품 전시회 기획‧콘텐츠 구성 ‧ 전시공간 설계 및 제작설치, 작품 운송 ‧ 전시그래픽, 영상콘텐츠 기획 및 설치 ‧ 인쇄물(전시리플렛,안내서,포스터) 제작	’20.5.~’20.10.	준비	25%	5%
과업이행 : 홍보 ‧ 서울공예박물관 홍보계획 수립 및 실행 ‧ 보도자료 작성, 기자간담회 계최 ‧ 온라인 SNS, 오프라인 매체 홍보	’20.5.~’20.11.	준비	15%	5%
준공, 과업완료 ‧ 결과보고서 등 성과품 납품(‘20.12.10)	’20.12.	준비	5%	0%
합 계			100%

※추진기간 및 단계는 일정에 따라 변경 가능

❍ 작품 제작과정 촬영 및 기록 ❍ 중간보고회 ❍ 작품 설치 및 시운전	’20. 5월~9월 ’20. 6월 ’20. 9월

□ 향후계획

붙임 1. 업무현황보고서(5월) 1부.

2. 회의사진 1부.  끝.