문서번호	급수설비과-5086
결재일자	2020.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
이재학		유동수	06/01 이규상
협 조

소규모 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 건설사업관리용역 주간 실적 보고

2020. 6. 1

상수도사업본부

(급수설비과)

『 소규모 상수도공사(급수,누수복구,시설물)  건설사업관리용역 주간 실적 보고

소규모 상수도공사(급수,·누수복구·시설물)의 건설사업관리용역에 대해 용역사 로부터 제출된 주간실적을 검토하고 결과 보고 드림.

Ⅰ. 현  황

용 역 명	강서·남부·강남지역 소규모 상수도공사의 건설사업관리용역	동부·북부·강동지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역	중부·서부지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역
용역개요	급수공사 : 15,676건 누수복구 : 15,090건 시 설 물 : 4,742건	급수공사: 13,032건 누수복구: 14,568건 시 설 물: 6,420건	급수공사: 10,526건 누수복구: 12,706건 시 설 물: 4,038건
용역기간	’19.6.22~’21.6.21	’19.6.22 ~ ’21.6.21	’19.6.22 ~ ’21.6.21
총 계약금액 (2차수 금액)	5,165,859천원 (2,506,072천원)	4,906,503천원 (2,379,921천원)	3,919,833천원 (1,914,412천원)
용 역 사	㈜건양ENG 대표이사 김종문 ㈜한국종합기술 대표이사 이상민	㈜이준ENG 대표이사 이승헌 ㈜ 천일 대표이사 김창욱	㈜대한콘설탄트 대표이사 이영민 ㈜한국종합ENG 대표이사 한명웅
과업내용	급수공사, 누수복구공사, 시설물공사, 간선배관공사에 대한 시공감리

(단위: 명)

인력배치 현황		계	강서	남부	강남	동부	북부	강동	중부	서부
투입 인원	계	77	28			27			22
	책임기술인	3	1			1			1
	기술지원기술인	3	1			1			1
	상주기술인	71	9	11	6	10	9	6	11	9
담당부서			급수설비과			누수방지과			시설관리과

Ⅱ. 금주 주요실적 보고

≪서울시 관내 총괄≫

□ 추진기간: 2020.5.18. ~ 5.24.

□ 추진실적

구 분		건설사업관리기술인			입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		감리대상 건수(계)	현장감독 (건)	사후확인 (건)
금 주		281	278	3	98.9	1,388.6	1
누계	‘20.1.1. 이후	4,927	4,881	46	99.1	16,569.0	17
	‘19.6.22. 이후	14,936	14,778	158	98.9	57,143.8	55

- 세부내용

구 분	지시 (시공건수)	건설사업관리(건수)						상수도관부설(m)			시정지시(건수)
		계	신설	구경 확대	폐전	개량	기타	계	50mm 이하	80mm 이상	계	서면	구두
금주	281	281	48	78	30	117	8	1,388.1	598.3	789.8	1	0	1
‘20.1.1. 이후	4,927	4,927	822	1,181	615	2,026	283	16,568.5	10,259.7	6,308.8	17	0	17
‘19.6.22. 이후	14,936	14,936	2,330	3,355	1,305	7,020	926	57,143.3	31,937.4	25,205.9	55	1	54

※ 불용관 정비현황

구 분	횡방향불용관(기존분기점)폐쇄						진행중	종방향 불용관			개량대상 배수관
	계	맹새들	새들 잠금	재사용	맞이음	기타		발견	폐쇄	진행중
금주	129	3	96	15	9	6	0	0	0	0	0
‘20.1.1. 이후	2,095	15	1,514	211	265	90	0	0	0	0	2
‘19.6.22. 이후	5,919	45	4,116	572	677	509	0	2	2	0	5

○ 포장복구공사(건설사업관리기술인)

구 분	계			급수공사업체 복구			포장복구업체 복구
	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)
금 주	151	141	93.4	40	40	100.0	111	101	91.0
누 계	3,104	2,905	93.6	672	672	100.0	2,432	2,233	91.8

- 세부현황

구분	총괄							급수업체 복구					포장복구업체 복구
	지시 건수	완료			미복구			지시 건수	완료			미 착공	지시 건수	완료			미복구
		계	현장 감독	사후	계	미 착공	표층		계	현장 감독	사후			계	현장 감독	사후	계	미 착공	표층
전주	2,953	2,953	2,764	189	0	0	0	632	632	632	0	0	2,321	2,321	2,132	189	0	0	0
금주	151	151	141	10	0	0	0	40	40	40	0	0	111	111	101	10	0	0	0
누계	3,104	3,104	2,905	199	0	0	0	672	672	672	0	0	2,432	2,432	2,233	199	0	0	0

○ 건설사업관리기술인 상호 업무지원

구 분	계				사업소 내				사업소 간
	계	급수	누수 복구	시설물	계	급수	누수 복구	시설물	계	급수	누수 복구	시설물
금주(회)	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0
누계(회)	75	49	6	20	75	49	6	20	0	0	0	0

○ 누수복구 공사

구 분	시행 건수	건설사업관리 건수
		입회건수	비율(%)	이첩(노후관)	1일 1인 건수
누계	7,367	6,922	94.0	48	2.7
금주 실적	387	365	94.3	5	2.9
전주까지 계	6,980	6,557	93.9	43	2.7

○ 시설물 공사

구 분	건설사업관리 건수			현장입회율 (%)	업무지원 (건)	시정조치 (건)
	계	현장입회(건)	사후확인(건)
누 계	2,746	2,730	16	99.4	110	22
금주 실적	187	187	0	100.0	12	5
전주까지 계	2,559	2,543	16	99.4	98	17

붙임 : 주간실적 보고 요약(용역사→본부) 1부(별도). 끝.