코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약 의뢰([서계2길]청파언덕길 조성 설계 용역)

1. 공공재생과-5887(2020.5.29.)호와 관련입니다.

2.  우리과에서 시행중인 「[서계2길]청파언덕길 조성 설계용역」설계변경을 시행하고자 변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : [서계2길]청파언덕길 조성 설계 용역

나. 기    간 : 2019.12.12. ~ 2020.06.08.

다. 용역금액 : 42,360,000원

라. 용 역 사 : 인시추 대표 장유진

마. 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 비	42,360,000원	42,360,000원	용역비 변동 없음
용역기간	‘19.12.12. ~ ’20.6.8.	‘19.12.12. ~ ’20.9.8.	용역기간 3개월 증가

바. 변경사유

- ******************************************************************

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	공공재생과장
주무관	윤지선		공공재생정책팀장	신명승		공공재생과장	06/01 이동일
협조자	계약1팀장	代신충수
시행	공공재생과-5949	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)